문서번호	방재시설부-11651
결재일자	2016.7.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		공원시설과장	방재시설부장
박계현		김인숙	07/25 代이도헌
협 조
	주무관			손병도

『경의선숲길 공원조성공사(2단계) 건설폐기물처리용역』    설계변경(전체4회, 금회 2차 3회) 검토 보고

2016.07

도시기반시설본부

방재시설부

『경의선숲길 공원조성공사(2단계) 건설폐기물처리용역』

설계변경(전체 3회,2차3회) 검토 보고

『경의선숲길 공원조성공사(2단계) 건설폐기물 처리용역』 설계변경에 대한 검토 보고임.

▶ 관련근거 : ㈜유신 감리16-742(2016.07.20.)호 관련

Ⅰ

용 역 현 황

○ 용 역 명 : 경의선숲길 공원조성공사(2단계) 건설폐기물 처리용역

○ 용 역 사 : 씨제이대한통운(주) & ㈜장형기업

○ 용역기간 및 계약금액 현황

(단위 : 천원)

구 분	총 괄	1차	2차
기 간	2013.10.22.~2016.07.31	2013.10.22.~2014.12.21	2014.12.22.~2016.07.31
금 액	386,696	174,394	212,302

Ⅱ

설계변경 검토

○ 설계변경 사유

- 2단계 2차공사구간(원효동, 신수동, 와우교, 새창고개 잔여분) 실 처리 건설     폐기물 수량 정산

○ 관련근거

- 과업내용서 3.1.2 설계변경 조건 나항에 의함

나. 건설폐기물 수집·운반 및 처리량은 확인된 반출물량에 따라 정산함.

○ 수량 변경 검토

- 전 체

구 분	단 위	당 초	변 경	증 · 감	비 고
1.폐기물운반	㎥	4,040	4,799.3	(증) 759.3
2.폐기물처리	ton	8,255	10,177.8	(증) 1,922.8
1)폐콘크리트	ton	4,139	7,178.9	(증) 3,039.9
2)폐아스콘	ton	1,663	983.8	(감) 679.2
3)혼합건설폐기물	ton
4)건설폐토석	ton	2,453	2,015.1	(감) 437.9

- 2차분

구 분	단 위	당 초	변 경	증 · 감	비 고
1.폐기물운반	㎥	4,040	4,799.3	(증) 759.3
2.폐기물처리	ton	8,255	10,177.8	(증) 1,922.8
1)폐콘크리트	ton	4,139	7,178.9	(증) 3,039.9
2)폐아스콘	ton	1,663	983.8	(감) 679.2
3)혼합건설폐기물	ton
4)건설폐토석	ton	2,453	2,015.1	(감) 437.9

○ 공사비 변경 검토

- 전 체                                                 (단위 : 백만원)

구 분	당 초	변 경	증 · 감	비 고
1) 순공사비	89,170	94,305	(증) 5,135
①폐기물운반비	89,170	94,305	(증) 5,135
2)일반관리비	4,458	4,715	(증) 257
3) 이 윤	9,362	9,901	(증) 539
4)폐기물처리비	248,552	268,674	(증) 20,122
1. 공급가액	351,542	377,595	(증) 26,053
2. 부가가치세	35,154	37,760	(증) 2,606
3. 용역금액	386,696	415,355	(증) 28,659

- 2차분                                                 (단위 : 백만원)

구 분	당 초	변 경	증 · 감	비 고
1) 순공사비	48,138	53,273	(증) 5,135
①폐기물운반비	48,138	53,273	(증) 5,135
2)일반관리비	2,407	2,664	(증) 257
3) 이 윤	5,054	5,593	(증) 539
4)폐기물처리비	137,403	157,526	(증) 20,122
1. 공급가액	193,002	219,056	(증) 26,053
2. 부가가치세	19,300	21,905	(증) 2,606
3. 용역금액	212,302	240,961	(증) 28,659

Ⅲ

보고자 의견

○ 설계변경(전체 4회변경, 2차 3회변경)에 대하여 검토한 결과 2차 공사구간 실 처리 건설폐기물 수량에 대하여 정산 설계변경함은 타당하며,

○ 정산 설계변경에 따라 증가된 용역비에 대하여는 푸른도시국에 예산 재배정 받아  폐기물 용역 계약 의뢰코자 함.

붙 임 : 설계변경 요청서 1부.  끝.