투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	설계변경(정산) 계약 의뢰(아동청소년 예술교육센터설치 기계공사)

우리 본부에서 시행중인 「아동청소년 예술교육센터설치 기계공사」에 대하여 아래와 같이 설계변경(정산) 계약 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 아동청소년 예술교육센터설치 기계공사

나. 계약금액 : 373,472,013원

다. 계 약 자 : ㈜삼건이엔씨 대표 김대웅

라. 설계변경(정산) 내용

구 분	계 약 금 액(원)			공 사 기 간		비고
	당 초	변 경	증․감	당 초	변 경
도급비	373,472,013	376,299,000	증)2,826,987	2015.11.06. ~ 2016.07.29.	변경없음

마. 설계변경(정산) 사유 : 물량변동 반영 및 보험료 정산
바. 예산과목 : 설비부, 문화도시서울구현, 문화향유공간및문화기	반시설 조성, 지역예술교육센터조성, 시설비

붙임  1. 설계변경(정산) 보고서 1부.

2. 설계변경(정산) 내역서 1부.

3. 제비율 검증 확인서 1부.

4. 합의각서  1부.  끝.

	설비부장
★주무관	이호완		건축설비과장	김영수		설비부장	07/26 권오식
협조자	경리과장	최정수
시행	설비부-11879	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동 96) 프리미어플레이스빌딩 15층 설비부	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8627	/전송	02-3708-8659	/	lee5858@seoul.go.kr	/	부분공개(5)