문서번호	도시철도토목부-9564
결재일자	2016.7.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		토목3과장	도시철도토목부장
전영부		김정수	07/26 代윤방식
협 조
	건축공사과장			김내환
	시설전기과장			서태창
	설비공사과장			황영일

「서울지하철 9호선 3단계 921공구 전면책임감리용역」

발주계획 검토보고(7차)

2016.  7.   .

도시기반시설본부

(도시철도토목부)

「서울지하철 9호선 3단계 921공구 전면책임감리용역」

발주계획 검토보고(7차)

『서울 지하철 9호선 3단계 921공구 건설공사 전면책임감리용역』7차 발주계획에 대한 검토 보고임.

□ 용역개요

○ 공 사 명 : 서울지하철 9호선 3단계 921공구 건설공사 전면책임감리용역

○ 계약금액 : (총괄) 5,728,689천원,  (7차)738,000천원

○ 용역기간 : (총괄) ’09.11.18~’16.12.31,7차),  ’16.7.27~’16.12.31.

○ 도 급 자 : ㈜유신  대표이사  성낙일

□ 발주계획

○ 계약금액 : 738,000천원(’16.7.27. ~ ’16.12.31)

(단위 : 원)

명 칭	노 무 비	경 비	합 계
	금 액	금 액	금 액
1-1. 토목분야	92,850,727	77,357,635	170,208,362
1-2. 건축분야	84,231,643	69,755,592	153,987,235
1-3. 기계분야	86,342,533	71,503,704	157,846,237
1-4. 전기분야	59,465,443	49,245,711	107,711,154
1-5. 소방분야	15,000,000		15,000,000
1-6. 사무원	10,759,827		10,759,827
1-7. 인쇄비	3,500,000		3,500,000
○ 합계	352,150,173	267,862,642	620,012,815
○ 단수정리			619,194,091
2. 물가변동			51,715,000
소계			670,909,091
3. 부가가치세			67,090,909
○ 총 용역비			738,000,000

○ 감리원 투입계획(투입인원 : 68.069인·월)

등 급			용역기간 및 감리투입계획	비 고
상주감리원	토목	감 리 사	’16.07.27. ~ ’16.12.31.
		감리사보	’16.07.27. ~ ’16.12.31.
		감리사보	’16.07.27. ~ ’16.12.31.
		감리사보	’16.07.27. ~ ’16.12.31.
	건축	감리사	’16.07.27. ~ ’16.12.31.
		감리사보	’16.08.01. ~ ’16.12.31.
		감리사보	’16.08.01. ~ ’16.12.31.
	기계	감리사	’16.07.27. ~ ’16.12.31.
		감리사보	’16.08.01. ~ ’16.12.31.
		감리사보	’16.08.01. ~ ’16.12.31.
	전기	고급	’16.08.01. ~ ’16.12.31.
		중급	’16.07.27. ~ ’16.12.31.
비상주감리원			’16.07.27. ~ ’16.12.31.	토목,건축,기계, 전기 및 소방

□ 검토결과

○ 7차용역 발주계획은 적정하다고 판단되어 서울 지하철 9호선 3단계 921공구 건설공사 전면책임감리용역(7차)을 상기와 같이 발주하고자 함.

붙 임 1. 7차용역 설계서 1부.

2. 7차용역 발주요청 공문 1부.   끝.