투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제 목	감리용역 설계변경 및 준공기한 연기의뢰(총괄 9회, 9차 1회)

우리 본부에서 시행중인 “응봉교 확장 및 성능개선공사 전면 책임감리용역”에 대하여 아래와 같이 변경계약 및 용역 준공기한 연기를 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 응봉교 확장 및 성능개선공사 전면 책임감리용역

나. 용역기간 : 총괄 :‘08.10.27. ~‘16. 7.29./ 9차 :‘16. 1. 1. ~‘16. 7.29.

다. 용역금액 : 총괄 : 4,459,020,000원   / 9차 :192,100,000원

라. 감 리 사 : ㈜건화 , ㈜ 제일엔지니어링 종합건축사무소

마. 감리용역 변경내역

구 분		당 초	변 경	증/감
용역비	총괄	금4,459,020,000원	금4,577,820,000원	증)118,800,000원
	9차	금192,100,000원	금310,900,000원	증)118,800,000원
용역 기간	총괄	‘08.10.27.~‘16. 7.29.	‘08. 10.27.~‘16. 9.20.	증)53일
	9차	‘16. 1. 1.~‘16. 7.29.	‘16. 1. 1.~‘16. 9.20.	증)53일

바. 설계변경 및 준공기간 연장 사유

- 공사기간 연장(‘16.6.30.→ 8.31.)에 따른 감리원 배치 계획 변경

- 잔여공사 감리 및 인수·인계 등 사후관리에 따른 감리 기간 연기

아. 예산과목 : 도로계획과, 도로건설, 간선도로망확충, 응봉교재설치, 시설비 및 부대비, 감리비

붙 임 : 1) 보고서 1부.

2) 설계변경 내역서 1부.

3) 준공기한 연기 의뢰서 1부.

4) 합의각서 1부.   끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
★주무관	이정원		터널건설과장	권혁대		토목부장	07/26 김영수
협조자	계약2팀장	양주춘
시행	토목부-15464	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로 8 프리미엄 플라이스 빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2567	/전송	02-3708-2599	/		/	부분공개(5)