문서번호	방재안전시설부-2510
결재일자	2014.2.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		방재시설과장	방재안전시설부장
이정국		홍석환	02/18 박종웅
협조
	주무관		임병길

설계변경(1차 2회) 검토보고(정산)

탄천물재생센터 복개공원화 (4단계)

2014. 2

도시기반시설본부

방재안전시설부

설계변경(1차분2회) 검토보고(정산)

탄천물재생센터 복개공원화(4단계)

『탄천물재생센타 복개공원화(4단계) 공사』의 1차분(2회)에 대한 설계   변경 실정보고에 대한 정산(물량) 검토보고 임.

Ⅰ		관련근거

○ ㈜유신 감리 14-151(214.2.17) : 설계변경(1차분2회) 내역제출

Ⅱ		공사개요

○ 위    치 : 강남구 일원동 580

○ 규    모 : 하수처리장 구조물복개 A=33,978㎡ , 보도육교 1개소

주민친화형 시설물 조성(텃밭 등)

○ 사업기간 : 2013.10.1 ～ 2016.9.29.

○ 도 급 비 : 26,236,474천원[1차분 2,494,750천원)]

○ 시공사/감리사 : 웅진개발(주)/ ㈜유신외 1

Ⅲ		설계변경(정산) 내용

○ 설계변경(정산) 사유

- 준공 시점의 시공물량 정산

○ 주요물량 정산내용(1차분)

구 분		단 위	당 초	변 경	증 ․ 감	비고
PC콘크리트	기둥 제작	매	207	263	증)56
	기둥 조림	매	120	210	증)90
	보 제작	매	220	250	증)30
	슬래브 제작	㎡	6,080	5,000	감)1,080
타워크레인	기초	개소	2	2	-
구조물조립장비	하이드로크레인 운영(1대)	월	0.5	0.8	증)0.3
복개기둥접속부	기둥 타설	개소	120	310	증)190
복개RC 구조물	외곽기초	m	17.2	-	감)17.2

○ 계약금액 조정현황

- 전체분 : 변경없음

- 1차 2회

(단위 : 원)

구 분		1 차 분			비 고
		당 초	변 경	증 ․ 감
총 공사비		2,500,000,000	2,500,000,000	변경없음
도급액	공급가액	2,267,954,546	2,267,954,546
	부 가 세	226,795,454	226,795,454
	계	2,494,750,000	2,479,750,000	변경없음	물량조정
관급자재비		-	-	-
이설비		5,250,000	5,250,000	변경없음	조달수수료

○ 계약기간 변경없음

구 분	계 약 기 간		비 고
	당 초	변 경
전체분	2013.10.01~2016.9.29	변경없음
1 차	2013.10.01~2014.2.28	변경없음

○ 책임감리원 검토의견

- 본 공사의 1차분 2회 수량 및 내역변경은

→ 1차 공사 준공일(2014.2.28.)을 고려하여 시공완료 수량으로 적용하였으며,

→ 주요 변경사항으로는 프리캐스트 구조물의 공장제작 및 현장 조립수량을 추가반영     하고 현장타설을 최소시공으로 변경하였음.

- 이에 따라 1차 공사 준공 변경내역에 적정하게 작성된 것으로 판단되어 보고하오니 조치하여 주시기 바람.

Ⅴ		조 치 계 획

○ 상기 책임감리원 설계변경(1차분 2회) 보고내용은 공사기간, 계약금액 변경없이 물량조정에 따른 정산에 대한 것으로 변경계약 없이 정산하여 준공처리코자 함.

붙임 : 1. 책임감리원 보고서 1 부.

2. 설계변경(정산) 내역서(1차분 2회) 1부. 끝.