투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제 목	경의선숲길, 경춘선 폐선부지 공원조성공사 통합 전면책임감리용역 설계변경(총차7회, 3차3회) 계약의뢰

우리 부에서 시행하는 『경의선숲길, 경춘선 폐선부지 공원조성공사 통합 전면책임감리용역』에 대하여 아래와 같이 설계변경(총차7회,3차3회) 계약의뢰하니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 경의선숲길,경춘선 폐선부지 공원조성공사 통합 전면책임감리용역

나. 계약금액 : 1,784,250,000원 (2차 계약금액 : 393,450,000원)

다. 용역기간 : 2013. 11. 27 ~ 2016. 8. 31 (3차 용역기간 2016.01.01.~2016.08.31)

라. 용 역 사 : ************

마. 설계변경 내역

1) 전체(총차 7회)

구분		금 액			비 고
		당 초	변 경	증 ․ 감
총공사비		1,784,250,000	1,760,350,000	(감) 23,900,000
도급비	공급가액	1,613,036,000	1,591,427,000	(감) 2,161,000
	부가가치세	161,304,000	159,143,000	(감) 2,161,000
	손해보험료	9,910,000	9,780,000	(감) 130,000
	계	1,784,250,000	1,760,350,000	(감) 23,900,000

2) 금회(3차 3회)

구분		금 액			비 고
		당 초	변 경	증 ․ 감
총공사비			369,550,000	(감) 23,900,000
도급비	공급가액	355,745,000	334,136,000	(감) 2,161,000
	부가가치세	35,575,000	33,414,000	(감) 2,161,000
	손해보험료	2,130,000	2,000,000	(감) 130,000
	계	393,450,000	369,550,000	(감) 23,900,000

계약기간	당 초	변 경	비고
전 체	13.11.27 ~ 16.08.31	13.11.27 ~ 16.08.12	(감) 0.6개월
금 회(3차)	16.01.01 ~ 16.08.31	16.01.01 ~ 16.08.12

3) 계약기간 변경

바. 설계변경 사유

- 감리원 배치계획 변경(최소 규모 조정 축소)

사. 예산과목 : 생활권 공원확충,도심공원 확충,경의선숲길 공원조성, 시설비 및 부대비, 감리비

붙 임 : 1. 설계변경시행방침서 1부.

2. 설계변경내역서(총차4회, 2차3회) 각 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	박계현		공원시설과장	김인숙		방재시설부장	07/27 代이도헌
협조자	주무관	손병도		계약2팀장	양주춘
시행	방재시설부-11773	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 14층 방재시설부	/
전화	3708-8684	/전송	3708-8756	/		/	부분공개(6)