투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	세종기술주식회사 대표이사
(경유)
제목	9호선3단계 시스템분야 책임감리용역 물가변동으로 인한 감리비 조정 결과 통보

1. 세종기술주식회사 제2016-19호(`16.5.12)와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 귀사에서 요청하신 『9호선3단계 시스템분야 책임감리용역』에

대한 물가변동으로 인한 감리비 조정 결과를 아래와 같이 통보하오니 감리업무 수행에

참고하시기 바랍니다.

가. 용역명 : 서울지하철9호선 연장건설(3단계) 시스템분야 전면책임감리용역

나. 계약자 : 세종기술(주) 대표 송진호외 2개사

다. 물가변동으로 인한 감리비 조정결과

∘ 1회 조정결과

구 분	조정요청	검토결과	비 고
계약체결일(직전조정일)	2014.12.29	2014.12.29
조정기준일(비교시점)	2015.03.30	2015.03.30
물가변동 대상 계약금액	2,901,630천원	2,901,630천원
물가변동 적용 제외금액	200,000천원	332,200천원	증 132,200천원
물가변동 적용금액	2,701,630천원	2,569,430천원	감 132,200천원
물가변동 조정율	3.6%	3.64%	증 0.04%
물가변동 조정 금액	97,394천원	93,527천원	감 3,867천원
조 정 후 감 리 비	2,999,024천원	2,995,157천원	감 3,867천원

∘ 2회 조정결과

구 분	조정요청	검토결과	비 고
계약체결일(직전조정일)	2014.12.29	2015.03.30
조정기준일(비교시점)	2015.03.30	2016.01.01
물가변동 대상 계약금액	2,999,024천원	2,995,157천원	감 3,867천원
물가변동 적용 제외금액	200,000천원	235,876천원	증 35,876천원
물가변동 적용금액	2,799,024천원	2,759,281천원	감 39,743천원
물가변동 조정율	3.36%	3.39%	증 0.03%
물가변동 조정 금액	94,050천원	93,539천원	감 511천원
조 정 후 감 리 비	3,093,074천원	3,088,696천원	감 4,378천원

라. 물가변동 조정금액을 반영한 계약변경 : 2018년 10월 예정

붙임 : 조달청 조정검토 보고서 각 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	고명규		송변전과장	박동규		도시철도설비부장	07/28 정찬웅
협조자
시행	도시철도설비부-8232	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 8층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02)772-7272	/전송	02)772-7308	/	rhaudrb@seoul.go.kr	/	대시민공개