투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	시립노원청소년직업체험센터 설계용역 준공기한연기 계약의뢰(계약이행기간 연기)

우리본부가 시행중인『시립노원청소년직업체험센터 설계용역 』에 대한 준공기한 연기를 아래와 같이 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 계 약 명 : 시립노원청소년직업체험센터 신축공사 설계용역

나. 계 약 자 :  ㈜엠파 종합건축사사무소(대표 마성호)

다. 계약금액 : 362,90,000원(금삼억육천이백구심만원)

라. 계약기간 : 2016.1.4. ~ 2016.7.31.

마. 변경계약 요청 내용 : 계약이행기간

구분	변경전	변경후	비고
용역기간	2016.01.04. ~ 2016.07.31.	2016.01.04. ~ 2016.12.30.	증152일

바. 연장사유

- 도시계획시설 변경에 따른 행정절차 지연으로 152일 연기요청

따로붙임 : 1) 공사기간 변경 방침 1부.

2) 준공기한연기의뢰서 1부.

3) 합의 각서 1부.  끝.

	건축부장
주무관	김연석		건축관리과장	곽동호		건축부장	전결 07/28 김진용
협조자
시행	건축부-9966	(		)	접수		(		)
우		서울시 중구 천계천로 8	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	3709-2656	/전송	02)3708-2659	/	ds9815@seoul.go.kr	/	부분공개(5)