문서번호	보행정책과-1270
결재일자	2016.7.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		보행정책팀장	보행정책과장
이동주		김현중	07/29 이방일
협조

도심보행길 안내표지판, BI 노면표지 제작 및 설치 계약 변경 계획

2016. 7.

도시교통본부

(보행정책과)

도심보행길 안내표지판, BI 노면표지 제작 및 설치 계약 변경 계획

도심보행길 시범구간 내 안내표지판, BI 노면표지 제작 및 설치계약과 관련, 종합안내판 영문 병기를 위한 추가 소요기간이 필요해 계약기간을 재연장하고자 함

□ 개    요

❍ 계 약 명 : 도심보행길 시범구간 안내표지판, 노면표지 등 제작 및 설치

❍ 계약기간 : 2016.5.24. ~ 2016.7.29

❍ 계 약 자 : ㈜삼우아트

❍ 계약금액 : 금115,994,790원(금일억일천오백구십구만사천칠백구십원)

❍ 계약방법 : 제한경쟁입찰

□ 계약 변경내용 : 계약기간

❍ 계약기간 변경내용 및 연장사유

항 목	기 존	변 경	비 고
계약기간	2016.5.24. ~ 2016.07.29	2016.5.24. ~ 2016.08.31	-
기간연장 사유	○ 종합 안내 표지판 영문 병기를 위한 추가 작업 기간 소요		-

❍ 계약금액 : 변동없음(※지체상금 부과 : 부과없음)

□ 향후 추진일정

❍ 변경계약(계약기간 연장)의뢰 : ’16. 7. 29

❍ 용역준공 및 정산:  ’16. 8. 31 ~

붙 임 : 1) 준공기한 연기의뢰서. 1부.

2) 합의각서. 1부.  끝.

【 붙 임 】

준공기한 연기의뢰서

1. 계약내용

가. 계약건명 : 도심보행길 시범구간 안내표지판, 노면표지 등 제작 및 설치

나. 계약업체 : ㈜삼우아트

다. 계약금액 : 금115,994,790원(금일억일천오백구십구만사천칠백구십원)

라. 계약년월일 : 2016. 5. 24.

마. 착수년월일 : 2016. 5. 24.

바. 준공기한   : 2016. 7. 29.

2. 위 용역의 준공기한을 다음과 같이 연기 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 연기기한 : 2016. 8.31.(33일 연장)

나. 연기사유 귀책소재 : 서울시

다. 지체상금 부과여부 : 부과없음

라. 연기사유

-  도심보행길 종합 안내표지판 영문 병기 작업으로 추가 기간 소요

2016 년  7월  29일

보행정책과장 이방일 (인)

서울특별시(분임)경리관 귀하