문서번호	기전과-8357
결재일자	2016.8.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	서부도로사업소장
장병준		양영민	08/01 한동근
협조

설 계 변 경 보 고

[‘16년 교통안전표지 설치 및 유지보수공사(연간단가)]

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 7.

서부도로사업소

(기전과)

설 계 변 경 보 고

[‘16년 교통안전표지 설치 및 유지보수공사(연간단가)]

2016년 교통안전표지 설치 및 유지보수공사(연간단가)와 관련하여 감리자로부터 작업물량에 대한 설계변경 의견서가 제출되어 검토하고 그 결과를 보고함.

□ 관련근거

○ ㈜건영이앤씨 건영본16-07-08호(2016.7.26.)

- 1차 설계변경 요청서류 제출

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2016년 교통안전표지 설치 및 유지보수공사(연간단가)

○ 공사위치 : 5개구(중구, 용산구, 은평구, 서대문구, 마포구 권역)

○ 공사내용 : 시도상 기존 및 신설 교통안전표지 관리

○ 계약금액 : 금79,141,230원

○ 공사기간 : 2016.3.9. ∼ 2016.12.31.

○ 계약업체 : 천년스텐(주) 대표 양동석

○ 감리업체 : ㈜건영이앤씨 대표 박준범

□ 감리자 의견

○ 설계물량과 작업지시에 따른 실제 공사물량과의 차이로 인한 설계변경

요청

□ 공사원가계산서 제경비요율 조정

○ 기타경비

- 당 초 : (재료비+노무비)×6.3%

- 변 경 : (재료비+노무비)×6.1% → 5억미만, 12개월 이내

□ 공사물량 변경내역

구 분	수 량		증∙감	비고
	당초	변경
교통안전표지 신설	64	262	증) 198
교통안전표지 교체	65	65	-
교통안전표지 도장,보수,복구	9	8	감) 1
교통안전표지 철거, 제거, 조정	68	80	증) 12
교통안전표지 이설	13	13	-
합 계	219	428

□ 설계변경금액(총괄)                              (단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 감
도급비	79,141,230	79,141,230	-

□ 조치의견

○ 감리자가 제출한 공사물량 변경 등 설계변경 내용이 적정한 것으로 검토

되어 이를 승인하고 설계변경을 시행하고자 함.

붙임: 1. 설계변경 서류제출 1부.

2. 계약금액조정검증확인서 1부.  끝.