문서번호	방재시설부-12163
결재일자	2016.8.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		치수시설과장	방재시설부장
조동협		김흥근	08/02 임춘근
협 조

도림천 상류 관악산 저류조 설치공사

공기단축 방안 검토 보고

2016. 8

도시기반시설본부

(방재시설부)

도림천 상류 관악산 저류조 설치공사

공기단축 방안 검토 보고

강남순환고속도로 개통에 따라 서울대 정문 앞 신림사거리 방향 2개 차선 확장으로 현 5단계 교통처리계획 공사구역을 확장하여 추가 구조물 설치가 가능하므로 이에 대한 적정성 검토 보고임

공사개요

○ 위    치 : 관악구 관악로1 서울대학교 내․외 및 주변

○ 규    모 : 빗물저류조 65,000㎥

- 서울대 내(공사완료) : 공대폭포 5,000㎥, 노천강당(버들골) 20,000㎥

- 서울대 정문 앞(공사중) : 40,000㎥

○ 공사기간 : '12. 1. 3 ~ '17. 5.30

○ 도 급 비 : 41,350백만원

○ 시공사 / 사업관리 : 남광토건외 1 / 신명건설기술공사

보고내용

○ 강남순환고속도로 개통에 따라 서울대 정문 앞 신림사거리 방향 2개 차선 확장으로 현 5단계 교통처리계획에서 추가 차선 점용이 가능한 실정임

<5단계 교통처리계획>            <추가 차선확보에 따른 공사구역 확대>

○ 추가 차선을 점용하여 현 5단계 공사구역을 확장할 경우 8단계 구조물 설치가 가능하여 공사 기간단축(약 3개월) 및 공사비 절감(약 140백만원)이 예상됨

※ 보완설계 납품지연(3개월)으로 공사기간 연장이 예상되었으나 금번 공기단축으로 당초 준공기한 완수 가능

검토내용

○ 서울대 정문 앞 5개 차선(직진 3, 유턴2)으로 운영되던 교통체계가 3개 차선(직진2, 유턴1)으로 변경되므로 인한 교통정체가 예상되나

○ 기존 버스노선 체계 변경으로 교통정체가 완화되었고 등․하교 시간 신호수 배치로 교통정체 해소시 시민불편사항 감소가 예상됨(서울경찰청 및 관악경찰서 협의 완료)

○ 공사구역 확대시 일부 가시설 미철거 구간이 발생되나 안정성 구조검토 및 기술지원기술자 확인결과 적정하다 검토됨

건설사업관리자 검토의견

○ 추가 차선 점용으로 공사구역을 확대하여 공사기간단축 및 공사비 절감 방안과 복공 미철거 구간에 대한 안정성 검토는 적정하다 판단됨

보고자 의견

○ 건설사업관리자의 검토의견이 적정하다 판단되어 실정보고사항을 승인처리하고 추후 설계변경시 계약내역에 반영하고자 함

붙임  건설사업관리자 검토보고서 1부.  끝.