문서번호	기전과-6069
결재일자	2016.8.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		기전과장
신대중		08/02 박심근
협 조
	주무관		이명호

『교통안전시설물 원인자 부담공사』

준공기한 연장요청 검토보고(서울숲역)

2016. 8.

성동도로사업소

(기  전  과)

『교통안전시설물 원인자 부담공사』

준공기한 연장요청 검토보고(서울숲역)

교통안전시설물 원인자 부담공사(서울숲역)의 준공기한 연장요청이 접수되어 검토하여 보고드림.

Ⅰ

관 련 근 거

○ 영호이앤씨 영호 원16-08-01호

Ⅱ

공 사 개 요

○ 공 사 명 : 서울숲역 지식산업센터 신축공사 중 교통신호기 설치공사

○ 공사위치 : 서울숲역 지식산업센터 신축공사 현장 주변

○ 공사기간 : 승인일로부터 ∼ 2016. 07. 31.

○ 원 인 자 : ㈜대선건설

○ 시 공 사 : ㈜한신이티씨

Ⅲ

준공연기 사유

○ 보고내용

장 소	당 초	변 경	변경사유
서울숲역 지식산업센터	- 승인일로부터 ∼2016.07.31.	- 승인일로부터 ∼2016.08.31.	인근주민 민원등으로 인하여 공사기간내 작업이 불가하여 준공기한 연장을 요청

○ 보고자 : ㈜영호이앤씨 이희정 감리원

Ⅳ

검 토 결 과

○ 교통안전시설물 원인자부담공사의 감리사 실정보고를 검토한 결과 민원 등 공사지연 사유가 발생하여 준공기한 변경을 승인하고자 합니다.

첨  부 : 원인자부담공사 준공기한 변경요청 1부.  끝.