문서번호	방재시설부-12250
결재일자	2016.8.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		공원시설과장	방재시설부장
박계현		김인숙	08/03 임춘근
협조
	주무관		윤석채

경춘선 폐선부지 공원조성공사(2단계)

지장물 및 플랫폼 주변 난간 철거에 대한  실정보고 검토

2016. 08

도시기반시설본부

방재시설부

『경춘선 폐선부지 공원조성공사(2단계)』

지장물 및 플랫폼 주변 난간 철거에 대한 실정보고

「경춘선 폐선부지 공원조성공사(2단계)」 지장물 및 플랫폼 주변 기존 난간 철거에 대한 실정보고 검토 보고임.

▶ 관련근거 : 선진경춘감-16-514(2016.8.03.)호

Ⅰ

공사개요

○ 공 사 명 : 경춘선 폐선부지 공원조성공사(2단계)

○ 위    치 : 노원구 경춘철교 ~ 산업대3길 고가철교

○ 규    모 : 공원조성 연장(L) 1.1km, 면적(A) 53,860㎡

○ 사업기간 : ‘15.10.6 ~ ’16.10.3 (1차수 ‘15.10.6 ~ ’16.8.5)

○ 공 사 비 : 5,445백만원

Ⅱ

실정보고 내용

○ 하계지하차도 상부 노원 생활환경실천단 컨테이너 보상완료(15.11.30)에 따른 철거

○ 경춘 플랫폼 경계 기존 난간 및 울타리가 미관상 저해요소로 철거 필요

- 현황 사진

노원 생활환경실천단 컨테이너	기존 난간 및 울타리 (녹천초등학교 및 성원아파트 측)

○ 공사비 검토                                                     (단위 : 천원)

공종명	규격	단위	당 초		변 경		증 감
			수량	공사비	수량	공사비	수량	공사비
부대공
난간 및 울타리 철거		m			60	247	(증) 60	(증) 247
컨테이너 철거		동			1	1,176	(증) 1	(증) 1,176
고재대		ton			0.73	-140	(증) 0.73	(감) 140
소 계						1,283		(증) 1,283
2) 직접공사비						1,283		(증) 1,283
3) 제경비						703		(증) 703
4) 도급액						1,986		(증) 1,986

Ⅲ

건설사업관리기술단 의견

○ 2015.11.30. 보상 완료된 노원 생활환경실천단(컨테이너)은 공사 추진을 위하여 철거가 필요하며, 경춘 플랫폼 주변 기존 난간 및 울타리는 재 설치 예정으로 철거가 필요하여 추후 설계 변경에 반영함이 타당하다고 판단됨.

Ⅳ

보고자 의견

○ 기존 지장물(컨테이너) 및 플랫폼 주변 기존 난간 철거에 대한 건설사업관리 기술단의 검토의견이 타당하여 승인 통보코자 하며, 차후 설계변경에 반영토록 조치코자 함.

붙  임 : 건설사업관리기술단 실정보고서 1부.  끝.