투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부도로사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경 시행(제1회)-탄천교 보수공사

우리사업소에서 시행 중인 『탄천교 보수공사』에 대하여 다음과 같이 설계변경 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 탄천교 보수공사

나. 공사기간 : 2016. 7. 4 ~ 10. 1

다. 도 급 자 : ㈜비봉건설산업  홍기순

라. 변경사유 : 물량 증가에 따른 설계변경

마. 금액 변경내역

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증․감
총공사비	746,053,620	795,280,520	증) 49,226,900
도 급 비	647,292,100	693,955,000	증) 46,662,900
관 급 비	98,761,520	101,325,520	증) 2,564,000

바. 물량 변경내역

공 종	규 격	단위	수 량
			당 초	변 경	증․감
교면방수	슈프림데크코트	㎡	5,043	5,566	증) 523
아스콘포장	WC-6, t=13mm, PG76-22, 표층용	a	50.43	55.66	증) 5.23
신축이음장치	new wave finger joint	m	92	92	-

사. 예산과목 : 교량안전과, 교량관리, 일반교량관리, 탄천교 보수공사, 시설비 및 부대비, 시설비. 끝.

붙 임  1. 방침서 사본 1부.

2. 설계변경 도서 1부. 끝.

주무관	정병윤		시설보수과장	박국남		동부도로사업소장	08/03 송만규
협조자	주무관	김종범		주무관	代장인숙		계약1팀장	조현
시행	시설보수과-5650	(		)	접수		(		)
우	06332	서울특별시 강남구 남부순환로 3142-33	/	http://www.seoul.go.kr
전화	2040-0381	/전송	2040-0308	/	jby5835@seoul.go.kr	/	대시민공개