투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울대공원
수신	시설과장
(경유)
제목	[변경계약 체결통보] -유인원관 관람로 개선공사

1. 시설과-4994(2016.7.27.)호와 관련입니다.

2. 귀 부서에서 의뢰한 공사(용역) 설계변경건에 대하여 아래와 같이 (변경)계약 체결하였음을 알려드리니 업무에 참고하시기 바랍니다.

◎ 계약체결 현황(변경)

(단위 : 원)

사 업 명	계약자 (대표)	변경사항		변경 계약 주요내용
		기 간	금 액
유인원관 관람로 개선공사	㈜윤슬건설 **********	공사기간 연장 (20일 연장)	공사비(도급비) 증가 (53,300,700원)	******** **도로확장폭 및 데크규모 변경 등에 따른 물량 증가로 증액(증53,300,700원) ‣금177,899,300원 → 금231,200,000원 - 공사기간 연장 (20일 연장) ‣2016.6.15~8.30을 → 2016.9.20까지

따로붙임  공사변경계약체결통보서 1부.  끝.

	총무과장
주무관	정한성		총무과장	08/04 이행용
협조자
시행	총무과-9285	(		)	접수		(		)
우	13829	경기도 과천시 대공원광장로 102	/	http://grandpark.seoul.go.kr/
전화	02)500-7310	/전송	02)500-7990	/	hshs90@seoul.go.kr	/	부분공개(6)