문서번호	방재시설부-12329
결재일자	2016.8.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		공원시설과장	방재시설부장
박계현		김인숙	08/04 임춘근
협조
	주무관		윤석채

경춘선 폐선부지 공원조성공사(2단계)

투명방음벽 지주 및 프레임 분체도장에 대한 실정보고

2016. 08

도시기반시설본부

방재시설부

『경춘선 폐선부지 공원조성공사(2단계)』

투명방음벽 지주 분체도장 실정보고 검토 보고

「경춘선 폐선부지 공원조성공사(2단계)」 투명방음벽 지주 및 프레임 분체

도장에 대한 실정보고 검토 보고임.

▶ 관련근거 : 선진경춘감-16-516(2016.8.03.)호

방재시설부-11278(2016.7.20.)호

Ⅰ

공사개요

○ 공 사 명 : 경춘선 폐선부지 공원조성공사(2단계)

○ 위    치 : 노원구 경춘철교 ~ 산업대3길 고가철교

○ 규    모 : 공원조성 연장(L) 1.1km, 면적(A) 53,860㎡

○ 사업기간 : ‘15.10.6 ~ ’16.10.3 (1차수 ‘15.10.6 ~ ’16.8.5)

○ 공 사 비 : 5,445백만원

Ⅱ

실정보고 내용

○ 투명방음벽에 설치되는 지주 및 프레임에 대하여 공원시설물 색채가이드        반영 하여 기와진회색으로 분체도장 (푸른도시국장 현장점검 시 지적사항 반영)

지주 및 프레임 : 아연도금 → 분체도장 (기와진회색)

○ 공사비 검토                                                     (단위 : 천원)

공종명	규격	단위	당 초		변 경		증 감		비 고
			수량	공사비	수량	공사비	수량	공사비
부대공
투명방음벽 지주		개			30	7,513	30	7,513	분체도장
투명방음벽프레임		개			116	4,196	116	4,196	분체도장
소 계						11,709		11,709
2) 직접공사비						11,709		11,709
3) 제경비						4,534		4,534
4) 도급액						16,243		16,243

Ⅲ

건설사업관리기술단 의견

○ 푸른도시국장 현장점검 시 지적사항 (공원시설물 색채가이드라인)을 반영하여 투명방음벽 지주 및 프레임을 기와진회색으로 분체도장함으로써 주변 경관과 어울리고, 공원이용객으로 하여금 안정감을 유도함이 적정하다고 판단됨.

Ⅳ

보고자 의견

○ 서울시 공원시설 색채디자인 가이드라인에 따라 투명방음벽 지주 및 프레임을 기와 진회색으로 분체도장함은 타당하여 승인통보코자 하며, 차후 설계변경에 반영토록 조치코자 함.

붙  임 : 건설사업관리기술단 실정보고서 1부.  끝.