투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	하도급 변경계약 알림 - 합정외 1개소 빗물펌프장 증설공사

1. 서울시 시설관리공단 공사감독1처-5826(2016.8.03.)호와 관련입니다.

2. 『합정외 1개소 빗물펌프장 증설공사』의 변경 계약에 따른 하도급  변경 계약 내용을 다음과 같이 알려드리오니 관련업무에 착오없으시기 바랍니다.

가. 하도급 변경계약 현황(토목 및 구조물공사)

구분	원도급자	하도급자	하 도 급 공사기간	도급액(천원)	하도급액(천원)	하도급율	업종
변경전	금강주택㈜	㈜일성엔지니어링	‘15.10.12. ~ ‘16.6.30.	1,835,360	1,636,602	89.17%	철근콘크리트공사업, 토공사업
변경후	“	“	‘15.10.12. ~ ‘17.4.30.	2,056,010	1,767,590	85.97%

나. 하도급 변경계약 현황(상수관로 이설공사)

구분	원도급자	하도급자	하 도 급 공사기간	도급액(천원)	하도급액(천원)	하도급율	업종
변경전	금강주택㈜	㈜혜성건설	‘15.12.7. ~ ‘16.12.31.	45,756	39,000	85.23%	상하수도 건설업
변경후	“	“	“	36,333	32,000	88.07%

붙 임 : 1. 공단 관련문서 및 검토보고서 각 1부.

2. 하도급 변경계약 관련서류(일성엔지니어링, 혜성건설) 각 1부.  끝.

	방재시설부장
주무관	박중모		치수시설과장	김흥근		방재시설부장	08/04 임춘근
협조자
시행	방재시설부-12331	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동 96번지) 프리미어플레이스빌딩 14층	/
전화	3708-8772	/전송	3708-8756	/	p05480548@seoul.go.kr	/	대시민공개