함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	광암아리수정수센터
수신자	내부결재
(경유)
제 목	공사 변경계약 체결보고[정수장 건축물 환경개선 공사]

우리 센터에서 시행중인 공사에 대하여 변경계약을 체결하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 공 사 명 : 정수장 건축물 환경개선 공사

나. 계약업체 : 아마존인테리어, 대표 신영기

다. 계약변경 내역

1) 준공기한 : 2016.07.06 ~ 2016.08.09(변경 없음)

2) 계약금액

○ 당초 48,041,558원 → 변경 49,791,558원(증1,750,000원)

3) 변경사유

○ 신규공종 및 시공물량 증 발생, 보험료 정산

라. 변경계약 일자 : 2016.08.04

붙임 : 1. 변경 계약서 1부.

2. 변경 내역서 1부.

3. 변경계약 합의서 1부.

4. 추가계약 보증서 1부.

5. 서울시 공사계약 특수조건 1부.

6. 공사계약 일반조건 1부. 끝.

주무관	윤충용		행정관리팀장	권영철		정수운영과장	정선교		광암아리수정수센터소장	08/04 차윤기
협조자
시행	정수운영과-10131	(		)	접수		(		)
우	12989	경기도 하남시 서하남로 293	/
전화	02)3146-5312	/전송	02)3146-5309	/		/	부분공개(6)