문서번호	건축부-10379
결재일자	2016.8.4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		의료시설과장	건축부장
김동석		김충범	전결 08/04 김진용
협조

『시립영보정신요양원 증축 및 리모델링』

건설폐기물 처리용역(2차) 시행계획

2016. 8.

도시기반시설본부

(건 축 부)

『시립영보정신요양원 증축 및 리모델링』

건설폐기물 처리용역(2차) 시행계획

우리 본부에서 추진 중인『시립영보정신요양원 증축 및 리모델링』의 건설폐기물 처리용역(2차) 시행계획을 다음과 같이 수립하여 시행하고자 함

1. 용역개요

용 역 명 : 시립영보정신요양원 증축 및 리모델링 건설폐기물 처리용역(2차)

용역업체 : ㈜한진산업 대표 김상현

위    치 : 경기도 용인시 처인구 이동면 묵리 464 외 8필지

용 역 비 : 62,018천원 (1차 : 45,779,000원, 2차 : 16,239,000원)

〔폐기물 처리용역 설계변경 시행 건축부-8747(2016.07.06.)〕

용역기간 : 2016.01.11. ~ 2017.03.21.

(착수일로부터 14개월, 건축공사 공기연장에 따라 폐기물 처리용역 기간 연장)

〔건축공사 기간 연장 시행 건축부-8197(2016.06.24.)〕

용역내용 : 폐기물 수집․운반 및 처리

- 처리물량 : 2,136.210톤

(단위 : 톤)

구분 종류	1차		2차	총차		비고
	변경 전	변경 후		변경 전	변경 후
폐콘크리트	373.980	1,529.500	148.626	522.606	1,678.126	▲1,155.520
건설폐자재	15.000	-	329.864	344.864	329.864	▼ 15.000
폐아스콘	211.150	95.750	-	211.150	95.750	▼ 115.400
혼합폐기물	4.298	32.470	-	4.298	32.470	▲ 28.172
합계	604.428	1,657.720	478.490	1,082.918	2,136.210	▲1,053.292

- 내용 : 증축 및 리모델링 공사 관련 폐기물 수집․운반 및 처리

2. 추진경위

2015.12.03. : 시립영보정신요양원 건설폐기물 처리용역 시행계획

2016.01.05. : 용역 계약

2016.01.11. : 용역 착수

2016.07.06. : 설계변경

2015.07.08. : 1차 용역 준공 완료

3. 2차 발주 건설폐기물 처리용역 계약 시행계획

구분	용역기간	공사금액	비고
총차	2016.01.11.∼2017.03.21.	62,018,000원	당초 2017.01.04.에서 건축공사 준공기간까지 연장
1차	2016.01.11.∼2016.07.08.	45,779,000원	완료
2차	2016.08.08.∼2017.03.21.	16,239,000원	금회 계약분

예산과목 : 시민건강국, 보건의료정책과, 정신보건사업강화로 시민 정신건강증진, 정신보건시설운영, 정신질환자 사회복귀시설, 시설비

4. 향후 추진계획

`16.08. : 2차 계약의뢰

`16.08. : 계약 및 착수

`17.03. : 용역준공(예정)

붙임 : 1. 건축공사 기간 연장 시행 1부.

2. 설계내역서 1부.  끝.