문서번호	시설과-5718
결재일자	2016.8.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설팀장	시설과장
김영수	김경수	08/04 김재균
협 조

『남산공원내 발생폐기물 처리용역』

준공기한 연기 검토보고

2016. 08

시  설  과

『남산공원내 발생폐기물 처리용역』

남산 및 산하공원 시설물 정비등 공원내 각종 발생폐기물에 대한

신속한 처리를 위하여 준공기한을 연장하고자 보고드림.

준공기한 연기 검토보고

Ⅰ		용 역 개 요

용 역 명 : 남산공원내 발생폐기물 처리용역

용역기간 : 2016.07.20.~2016.08.05.

도 급 액 : 10,972,500원

도 급 자 : 유림환경  윤건수

Ⅱ		준공기한 연기

연기기간

당 초 : ‘16.07.20. ~ ’16.08.05.

변 경 : ‘16.07.20. ~ ’16.08.31.

연기사유

『낙산공원내 배드민턴장 철거』에 따른 발생폐기물(목재 및 합성섬유)

의 신속한 처리를 위하여 준공기간 연기필요

- 관련근거 : 한양도성주변 정비관련 협조요청(한양도성도감-7665,16.08.02)

폐기물 반출후 올바로(폐기물적법처리시스템)시스템의 등록 및 확인

에 따른 행정소요시간 필요로 준공기간 연기

지체상금 부과여부 검토

연기사유 귀책소재 : 중부공원녹지사업소

지체상금 : 미부과

Ⅲ		보 고 의 견

상기와 같이 준공기한을 연기하여 용역시행에 만전을 기하고자 함

첨 부 : 준공기한 연기의뢰서 1부. 끝.