투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시품질시험소
수신	총 무 과 장
(경유)
제목	기술용역 준공기한 연기 요청

우리 부서에서 추진중인 ‘공용성에 근거한 도로포장 하자(품질평가)기준 개발’ 용역의 준공기한 연장을 아래와 같이 요청하니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용역개요

○ 용 역 명 : 공용성에 근거한 도로포장 하자(품질평가)기준 개발

○ 용역기간 : 2015.10.13. ~ 2016.08.06

○ 계약금액 : 273백만원

○ 용역업체 : ㈜로드텍+한국도로학회

나. 계약변경 요청내용 : 준공기한 연기

○ 변경내용 :

- 당초 ‘15.10.13 ~ ’16.08.06

- 변경 ‘15.10.13 ~ ’16.09.30

○ 변경사유 : 절대공기 부족

○ 귀책사유 : 서울특별시(지체상금 미부과)

붙임 : 1) 기술용역 준공연기 보고서 1 부.

2) 준공기한 연기의뢰서 1 부.  끝.

	도로포장연구센터장
주무관	윤상열		도로포장연구센터장	08/05 백종은
협조자
시행	도로포장연구센터-1659	(		)	접수		(		)
우	06763	서울시 서초구 태봉로 131 서울특별시품질시험소 도로포장연구센터	/
전화	02-3462-6718	/전송	02-3462-6710	/		/	대시민공개