바꾸고, 지키고, 뛰겠습니다
		서울특별시의회
수신	내부결재
(경유)
제목	『서소문 청사 2동 2층 회의공간 재배치 및 리모델링공사』계약금액(설계변경) 변경에 따른 계약변경 의뢰

서울시의회『서소문 청사 2동 2층 회의공간 재배치 및 리모델링공사』에 대하여 설계변경에 따른 계약금액 변경을 처리하고자 합니다.

다                         음 -

1. 계 약 명 :『서소문 청사 2동 2층 회의공간 재배치 및 리모델링공사』

2. 계약업체 : 주식회사 산호씨앤디(시공사), 이도건축사사무소(감리)

3. 계약금액 : 145,340,000원

4. 계약일자 : 2016.07.07.

5. 계약기간 : 2016.07.08.∼08.07.

6. 변경사항

구 분		변경 전 금액	변경 후 금액	증·감	비고
총 공 사 비		145,340,000	131,630,000	13,710,000	감
도 급 비	공급가액	132,127,273	119,663,637	12,463,636	감
	부가가치세	13,212,727	11,966,363	1,246,364	감
	합 계	145,340,000	131,630,000	13,710,000	감

붙   임  :  합의각서, 내역서 및 도면 1부. 끝.

주무관							김정수			시설관리팀장					이문주					의정담당관					08/05 정광현
협조자				의정지원팀장						박지향
시행			의정담당관-8433									(						)		접수											(						)
우	04519					서울특별시 중구 세종대로 125 시의회사무처 의정담당관															/			http://smc.seoul.kr
전화		02-3702-1263						/전송			02-3702-1244					/													/	부분공개(6)
지구촌 물 올림픽, 2015 대구경북 세계물포럼.