투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(공사 중지 통보 및 현장 관리방안 제출 요청)

1. 업무지시현장 : 올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사 (주)이산, 올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사 (주)한맥기술, 올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사 대보건설(주)

2. 작 성 일 자 : 2016-08-08 08:08:00

3. 지 시 내 용

『올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사』와 관련하여 소규모 환경영향평가 및 하천점용허가를 득하지 못하여 공사시행이 어려운 실정으로, 관계기관 협의 완료시까지 공사를 일시 중지 하오니(‘16. 10. 30일까지) 책임건설사업관리기술자는 ‘공사 중지 기간 동안 현장 관리방안’을 우리본부로 제출하여 주시기 바랍니다.  끝.

- 본 결재는 One-PMIS내 행정정보연계를 통하여 수행하는

문서로, 결재 완료 시 One-PMIS를 통하여 대상현장에 발송

처리 됩니다.

- 업무지시전 내용 수정을 원하는 경우 One-PMIS로 반송

후 One-PMIS에서 재작성을 해주시기 바랍니다.

주무관							이현국			터널건설과장					08/08 권혁대
협조자				주무관						전병철					주무관							윤원섭
시행			토목부-16402									(						)		접수											(						)
우	04520					서울시 중구 청계천로 8 프리미엄 플라이스 빌딩 12층															/			http://infra.seoul.go.kr
전화		02-3708-2569						/전송			02-3708-2599					/	leehk1@seoul.go.kr												/	대시민공개