함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서울특별시
수신자	(주)티오에스코리아 대표 이승환귀하(150-992 서울특별시 영등포구 당산로2길 12, 에이스테크노타워 907호(문래동3가))
(경유)
제 목	'13년 운행제한차량 단속차량 운전원 용역계약 변경 요청

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀사와 2013. 2.22.일자 계약체결되어 2014. 2.28일자로 계약 종료되는 우리시 「2013년 운행제한 단속차량 운전원 용역」이 다음과 같은 사유로 계약변경 사항이 발생하였기 용역 계약을 변경하고자 하오니 2014. 2.19(수)까지 관련 서류를 제출하시기 바라며,

3. 준공금 신청시에는 ‘준공신고서’, ‘운전원 봉급지급명세서’, ‘용역비 정산서’, ‘국세및지방세완납증명서’, ‘통장사본’을 제출하시기 바랍니다.

가. 계약변경 내용

- 계약지연으로 ‘13.3.1~3.25일 까지 미근무(도로시설과-6148,2013.4.7.)

- ‘13.7월 운전원 주간5일, 야간5일 공백발생(도로시설과-14214,2013.8.7.)

- ‘13.8월 운전원 주간2일, 야간2일 공백발생(도로시설과-16037,23013.9.6)

- 용역비 산출기초 내역서에 명시된 노무비, 경비 명목의 미납분 국민연금 및 미지급 사유발생 퇴직금, 기타 내역의 정산

나. 계약변경 사유

- 지연된 일수의 노임과 근로기준법상 요건에 부합하지 않은 퇴직금 감액 및 기초 산출금액에 반영된 국민건강보험료, 국민연금보험료, 노인장기요양보험료 등의 미집행 내역 정산 필요. 끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	임길채		시설기획팀장	김종호		도로시설과장	02/18 이용심
협조자
시행	도로시설과-2700	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서울시청 서소문별관 2동 1층	/
전화	02)2133-1660	/전송	02)2133-1078	/	agynada@seoul.go.kr	/	대시민공개