문서번호	전산정보과-8962
결재일자	2016.8.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	전산정보과장	요금관리부장
장병균	홍동섭	08/08 代조두업

PDA활용 계량기교체시스템 구축 사업

월  간  보  고(‘16.7월)

2016.8

요금관리부

(전산정보과)

PDA활용 계량기교체시스템 구축 사업

월  간  보  고(‘16.7월)

「PDA활용 계량기교체시스템 구축」사업 추진과 관련하여

개발을 위한 업무분석 등‘16.7월 추진실적 및 차월계획

을 보고 함

Ⅰ		현황

□ 사 업 명 : PDA활용 계량기교체시스템 구축

□ 사업기간 : ‘16. 5. 3 ∼ 9. 30

□ 진척현황

업 무 별 진 척 현 황
업무 구분	공정율 목 표	누적 진척률(%)		비 고
		계획	실적
분석/설계	20%	20%	20%	-업무/환경분석(14%) -개발환경구축(14%)
시스템구현	40%	40%	35%
시험/안정화	20%	0	0
장비/솔루션 (기타 업무)	20%	20%	17%	-도입장비, 보안모듈 검토 등
전체 공정율	100%	80%	72%

Ⅱ		추진실적

□ 설계업무

○ 분석서작성

- 통신 구성도 작성, 화면설계서 보완

□ 개발업무

○ 디자인

- PDA화면별 디자인 작업

○ PDA 어플 개발

- SecureVPN 연계 코드, 로그인, 공지사항 및 교체업무처리 개발

○ PDA 중계서버 개발

- 로그인, 교체업무 및 공지사항 API

○ 대행업무지원시스템 개발

- PDA 단말기 관리, 교체원관리 및 교체업무조회 개발

Ⅲ		차월계획

□ 개발업무

○ PDA 어플 개발

- 비밀번호 변경, 업무정보 다운로드·업로드 및 처리결과 전송 개발

○ PDA 중계서버 개발

- 업무정보, 처리결과 및 업무지시 API

- 이미지맵 엔진 개발

○ 대행업무지원시스템 개발

- 교체업무배정, 교체업무결과처리 및 작업보고 개발

Ⅳ		일정표

주요 이슈 및 협조 요청 사항
월간 주요이슈	시범 운영 기간 조율 및 중간 보고 일자 확정