등록번호

문화체육과-14433

★주무관

문화체육시설팀장

문화체육과장

복지문화국장

등록일자

2016.8.5.

김현오

박천경

代조영아

08/08

기봉호

결재일자

2016.8.8.

공개구분

대시민공개

협  조

정책기획담당관

임근래

예산팀장

김정현

홍제배드민턴장 환경 개선공사 낙찰차액 사용계획

서 대 문 구

문화체육과

홍제배드민턴장 환경 개선공사 낙찰차액 사용계획

홍제배드민턴장 시설개선공사 사업과 관련, 전기공사 등 시행에 필요한 사업비가 절대 부족하여 낙찰차액으로 시행하고자 합니다.

▢ 사업개요

○ 사 업 명 : 홍제배드민턴장 환경개선 사업

○ 위    치 : 서대문구 홍제동 280-9(850㎡)

○ 사업기간 : 2016. 2월 ~ 9월

○ 사업내용

- 배드민턴장 기존 바닥 철거 후 마루바닥 설치, 외벽흡음 단열벽체 설치

- 화장실, 샤워장, 정화조, 급배수 및 오수관 설치

○ 사 업 비 : 317,000천원(시비 150,000천원/ 구비 167,000천원)

▢ 추진현황

○ 2015. 12월 : 서대문구 및 서울시 생활체육시설 기능개선(시범)사업 예산편성

○ 2016. 1~2월 : 관계자(공단, 클럽 등) 협의 및 공사 추진계획 수립

○ 2016. 3~5월 : 설계용역 시행 및 준공

○ 2016. 6월  : 환경개선공사 발주

▢ 예산현황

(단위 : 천원)

적요	예산액	집행액			집행잔액 (C=A-B)	비고
		발주금액	낙찰액	낙찰차액
계	317,000	311,873	280,190	31,683	5,127
설 계 비	317,000	12,909	12,260	649	5,127	낙찰차액 + 집행잔액 = 36,810
공 사 비		253,660	222,650	31,010
관급자재		45,304	45,280	24

▢ 낙찰차액 사용

○ 사    유 : 환경개선 공사 시행에 따른 추가적인 전기, 시설관리동 설치 비용

절대 부족으로 동 사업을 온전히 추진하기 위해 낙찰차액을 사용

○ 추가 소요예산

- 홍제배드민턴장 환경개선 전기공사 – 16,000천원

- 시설 관리 동 설치공사 – 20,000천원

○ 낙찰차액 사용 : 31,683천원(설계, 공사 등 낙찰차액)

○ 예산과목 : 문화체육과, 생활체육활성화 및 여가선용 기회제공, 생활체육시설

개선 및 확충, 체육시설물 설치보수, 시설비 및 부대비, 시설비

▢ 홍제배드민턴장 현황