문서번호	전산정보과-8963
결재일자	2016.8.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	전산정보과장	요금관리부장
박종회	홍동섭	08/08 代조두업

뚝도정수센터 광통신선로장애 관련 자가통신망 안전관리 교육결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

‘16. 8

전 산 정 보 과

뚝도아리수정수센터 광통신선로장애 관련

자가통신망 안전관리교육 실시 결과

상수도 자가통신망(u Arisu-Net) 뚝도아리수정수센터 공사현장장애와 관련 재발방지를 위한 안전관리 교육을 시행하고 다음과 같이 보고드림

□ 교육개요

𐩒 일  시 : 2016. 8. 1(월) 13:00∼13:40

𐩒 장  소 : 뚝도정수센터 시설현대화 안전교육장

𐩒 교육자 : 담당주무관 박종회

𐩒 대  상 : 뚝도정수센터 공사관계자(시공사, 감리단) 65명

□ 주요 교육내용

𐩒 상수도 자가통신망 구성과 기능(전화, 인터넷, 각종 행정업무망)

𐩒 장애기간 중 피해현황

- 행정전화 및 비상통신체계 단절, 공문서 유통체계 단절

- 인터넷을 활용한 서울시 및 본부 각종 업무망 전면 단절

𐩒 장애원인 분석

- 개별 공정계획으로는 예측하기 어려운 사고이나

- 선행공정과 후속공정을 조합하는 다중 시공계획도를 작성하여 검토시 예방할 수 있는 사고임

- 본부 등 관계부서에 검측을 요청하지 않음

𐩒 대책

- 복합공정 수행시 다중 시공계획도를작성 관계부서에 사전검측 요청

- 감리, 현장대리인의 시공전 위험예방활동(TBM) 적극 활용

* TBM (Tool Box Meeting) 현장작업자 간 사전 안전에 대하여 토의하는 위험예방활동

따로붙임 : 1. 교육참석 확인  1부.

2. 교육교재       1부.   끝.