	119특수구조단
수신자	내부결재
(경유)
제 목	산악구조대 환경개선 및 급수공사 계약기간 연장 승인 보고

1. 관련문서

가. 산악구조대-2986(2016.8.5.)호『환경개선 및 급수공사 실정보고 검토요청 확인』

나. 원석이엔씨(주) 16-119-2(2016.8.3.)호『산악구조대 환경개선 및 급수공사의 실정 보고서 제출건』

다. 행정지원과-8905(2016.7.4.)호『산악구조대 환경개선 및 급수공사 계약체결 보고』

라. 산악구조대-2233(2016.6.14.)호『산악구조대 환경개선 및 급수공사 등 계약 의뢰』

2. 위와 관련하여 산악구조대에서 요구한 “산악구조대 환경개선 및 급수공사”건에 대하여 계약상대자의 계약기간 연장 청구가 있어 공사가 적절히 이행될 수 있도록 연장 승인 하고자 보고 합니다.

가. 건    명 : 산악구조대 환경개선 및 급수공사

나. 계약금액 : *************************

다. 계약상대자

업체명	대표자	소재지	사업자등록번호	연락처
********	***	********************	************	************

라. 계약기간

	계 약 일	준공기한	비 고
변경 후	2016.7.4.	2016.8.18.까지	준공기한 연장 승인
변경 전	2016.7.4.	2016.8.8.까지

마. 변경이유 : 관계부서 정화조 설치신고 승인 지연에 따른 공사의 일시정지

바. 관련근거 : 「지방차치단체 입찰 및 계약 집행기준」 제13장 제8절 의 2

사. 지체상금 : 계약상대자의 책임에 속하지 아니하는 사유로 미부과

붙임  공사 실정 보고서 1부  끝.

담당자	성재욱		행정팀장	신용호		행정지원과장	권태미		119특수구조단장	08/08 代권태미
협조자
시행	행정지원과-10688	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 퇴계로26길 52	/
전화	02-3706-1915	/전송	02-3706-1929	/	gaja1813@seoul.go.kr	/	부분공개(5)