함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	광암아리수정수센터
수신자	정수시설과장
(경유)
제 목	공사 변경계약 체결통보[여과지동 등 구조물보수 및 환경개선공사]

정수운영과-6368(‘16.05.18)호의 공사계약 체결통보와 관련 공사계약이 별첨과 같이 변경 되었으니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 여과지동 등 구조물보수 및 환경개선공사

나. 계약업체 : 유로환경테크(주), 대표 설건형

다. 계약변경 내역

1) 공사기간 : 2016.05.18 ~ 2016.08.15(변경 없음)

2) 계약금액

○ 당초 134,213,000원 → 변경 135,796,000원(증 1,583,000원)

3) 변경사유

○ 시공물량 증·감 및 보험료 정산, 환경보전비 정산

라. 변경계약 일자 : 2016.08.08

붙임 : 1. 변경 계약서 1부.

2. 변경 내역서 1부.

3. 변경계약 합의서 1부.

4. 추가 계약보증서 1부.

5. 서울시 공사계약 특수조건 1부.

6. 공사계약 일반조건 1부. 끝.

	정수운영과장
주무관	윤충용		행정관리팀장	代윤충용		정수운영과장	08/08 정선교
협조자
시행	정수운영과-10309	(		)	접수		(		)
우	12989	경기도 하남시 서하남로 293	/
전화	02)3146-5312	/전송	02)3146-5309	/		/	부분공개(6)