투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신자	관리과장
(경유)
제 목	준공기한 연기(계약변경)의뢰

1. 우리센터 『3소화조 MCC 제작구매 설치』 및 『3원심농축기동 등 2개소 MCC 제작구매 설치』건에 대하여 아래와 같이 준공기한을 변경 계약 요청 합니다.

가. 준공기한 변경내역

1) 3소화조 MCC 제작구매 설치

- 당초 : ‘16. 03. 29 ~ ’16. 08. 26

- 변경 : ‘16. 03. 29 ~ ’16. 12. 19

- 계약금액 : 변경없음

2) 3원심농축기동 등 2개소 MCC 제작구매 설치

- 당초 : ‘16. 04. 19 ~ ’16. 09. 16

- 변경 : ‘16. 04. 19 ~ ’16. 12. 19

- 계약금액 : 변경없음

붙임 : 보고서 1부.  끝.

	시설보수과장
주무관	박성철		시설보수과장	08/08 윤승범
협조자
시행	시설보수과-4085	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 중랑물재생센터	/	www.seoul.go.kr
전화	2211-2562	/전송	2211-2579	/	psc4545@seoul.go.kr	/	대시민공개