문서번호	방재시설부-12490
결재일자	2016.8.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		방재시설과장	방재시설부장
송민영		代송민영	08/08 임춘근
협조	의료시설과장		김충범
	열빛총괄과장		유병기

『탄천물재생센터 복개공원(4단계)공사』

다목적체육시설 및 온실공사 시행계획 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016.  8.

도시기반시설본부

방재시설부

『탄천물재생센터 복개공원(4단계)공사』

다목적체육시설 및 온실공사 시행계획 검토보고

「탄천물재생센터 복개공원(4단계)공사」에 추가되는 다목적체육관 및 온실공사에 대한 시행계획을 다음과 같이 검토하여 보고드림.

□ 공사개요

○ 위    치 : 강남구 일원동 개포로 625(탄천물재생센터 2처리장)

○ 규    모 : 복개 33,978㎡ 공원조성 1식, 관리동 화장실 등

※ 추가 공사 : 다목적 체육관(막구조형식) 2,211㎡, 온실 720㎡

○ 공사기간 : 2013.10.1. ~2016.9.29

※ 추가 공사기간 : 착공일로부터 7개월 소요(주변정리 2개월 포함)

○ 도 급 비 : 26,195백만원【추가공사(설계가기준)3,530백남원】

□ 추진현황(다목적 체육관 및 온실)

○ `15.12.31 : 탄천복개 4단계 상부 활용계획 변경(물재생시설과)

- 실시설계 : 탄천환경 시행,     설계변경 및 공사 : 도기본 시행

○ `16.03.11 : 다목적 체육시설 및 온실 기본 및 실시설계 계약(탄천환경)

○ `16.06.27 : 다목적 체육시설 및 온실 기본 및 실시설계 완료

○ `16.07.14 : 추가공사 협의율(적용단가) 설계가 적용 요청(시공사)

○ `16.07.16 : 시공사 추가공사 협의율(적용단가)의견 주관부서 협의

○ `16.07.28 : 추가공사 협의율(적용단가) 검토결과 통보(물재생시설과)

- 추가공사 협의율 설계가 적용은 곤란하고, 강제 협의율 적용

○ `16.07.28 : 추가공사 협의율(적용단가) 주관부서의견 통보

○ `16.08.05 : 추가공사 협의율(적용단가) 시공사 의견 제시(서울시의견 수용)

□ 사업시행 방안

○ 시행부서 지정

구 분	세 부 공 정	시행부서	비고
다목적 체육관 (막구조 형식)	막구조 물품구매 공사	건 축 부
	관리실, 화장실, 다목적실 등 건축공사
	바닥포장(우레탄) 등
	기계ㆍ전기ㆍ소방설비 등	설 비 부
온실 (창호 및 유리)	건축공사	건 축 부
	기계ㆍ전기ㆍ소방설비 등	설 비 부

○ 시행방안

- 공  사 : 본 공사에 설계변경 반영

· 시행  부서 : 설계검토 및 설계변경 소심의위원회 개최 후 방재시설부 통보

· 방재시설부 : 설계변경 본부심의 위원회 상정

※ 추가 공사 협의율 협의결과 강제조정율 적용(시공사 공문접수)

- 감  리 : 본 감리에 설계변경 반영(방재시설부)

□ 향후계획

○ `16.08. : 설계변경 심의 및 설계변경 시행(선 공사시행)

○ `16.09. : 복개공원 공사준공

○ `16.12. : 다목적 체육관 및 온실 공사 완료

○ `17.05. : 다목적 체육관 및 온실주변 마무리(동절기 공사중지포함)

붙임 시공사 공문 1부. 끝.