문서번호	도로보수과-3806
결재일자	2016.8.9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	성동도로사업소장
이기영		이상호	08/09 이종엽
협 조
	주무관			홍수종

‘16년 교통사고 잦은 곳 개선 추진계획 변경보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

성동도로사업소

(도로보수과)

‘16년 교통사고 잦은 곳 개선 추진계획 변경보고

□ 추진근거

- 2016년 교통사고 잦은 곳 등 개선사업 예산 재배정 및 사업추진 협조 요청(교통운영과-4348, 2016.3.11)

- 2016년 교통사고 잦은 곳 개선 추진계획보고(도로보수과-2516, 2016. 5. 31)

□ 변경사유 및 내용

❍ 변경사유

- 무단횡단금지시설 설치를 위한 중앙차선 폭(최소 60cm) 확보가 어려워 무단횡단금지시설 설치 불가

❍ 변경내용

- ‘16년 교통사고 잦은곳 개선 대상지점 중 서울시체육회 사거리 중랑천로상에 당초 무단횡단금지시설을 150m를 설치하는 것으로 계획되어 현장실사 결과 현재 1차선 2.7m 및 2차선 3m로 차선조성이 불가

※ 무단횡단금지시설 60경간(150m) 관급자재 계약완료(납품요구번호 12-16-2-31115-00, ‘16. 6. 23)

□ 조치의견

❍ 무단횡단금지시설 변경설치 검토 요청(성동도로사업소→

교통운영과,2016. 7. 28) → 유선으로 변경설치 협의완료

- 당초 : 서울시체육회 사거리~중랑천로 72(150m)

- 변경 : 광진구 동일로 화양사거리~동일로 199(약 150m)

❍ 위 변경설치 검토안에 의거 무단횡단금지시설 설치하고자

하며 변경설치에 따른 노면표시 삭선 및 재도색 물량은

「2016 노면표시 유지보수공사(연간단가)」 설계변경시

반영하여 정산조치 예정.

※ 변경지점 설치 가능여부는 도로교통공단에서 검토완료

붙임 : 1. 무단횡단금지시설 변경설치 검토요청 공문 1부.

2. 위치도 1부.   끝.