문서번호	현장민원과-15163
결재일자	2016.8.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		현장민원과장
권기섭		08/09 代이관주
협조

노후 옥내급수관 교체목표 달성계획

2016년 8월

강 남 수 도 사 업 소

(현장민원과)

노후 옥내급수관 교체목표 달성계획

우리사업소의 2016년 노후 옥내급수관 교체목표 달성 계획을 아래와 같이 보고합니다.

□ 2016년 추진 목표

○ 교체목표 가구

∘ 11,000가구 (세대급수관 5,000가구, 공용급수관 6,000가구)

□‘16.6.30.까지 계획대비 추진실적

(단위 : 가구)

구 분	목표	계획	실적	실적율(%)
계	11,000	4,400	3,611	32.8

□‘16.8.5.까지 계획대비 추진실적

(단위 : 가구)

구 분	목표	계획	실적	실적율(%)
계	11,000	5,500	4,491	40.8

□‘16.8.5.까지 공용급수관 추진현황

아파트명	건축년도	가구수	진행상황	비고
계		5,643
삼풍	1988	1,340	공사중(60%)	9월초 완료예정
개포대청	1992	822	공사중(70%)	8월중 완료예정
우면동고	1993	330	공사중(30%)	9월말 완료예정
수서까치마을	1993	1,403	설계입찰 완료	하반기 시행
일원목련	1993	650	설계입찰 완료	"
방배우성	1990	468	공사계획서 제출	"
청담삼성진흥	1984	630	공사계획서 제출	"

□‘16년 교체목표 달성계획

(단위 : 가구)

교체목표	추진실적 및 향후계획				달성률(%)
	계	현재까지 추진실적	공용배관 확보물량	세대 및 공용 예상물량
11,000	11,134	4,491	5,643	1,000	101.7

∘ 현재까지 지원실적이 양호하며 공용배관 물량이 확보 되어 있으며 차후 예상물량도 있어 목표 달성은 가능

□ 향후 계획

○ 현재 컨설팅을 완료한 아파트 단지를 위주로 조기공사를 추진토록 독려

○ 급수관 개량공사에 대한 효과 향상을 위하여 다세대 공용배관 및 세대배관 동시교체토록 지속적 홍보

○ 옥내 급수관 개량공사에 대한 홍보를 더 강화하여 교체대상 물량을 지속적으로 확보.   끝.