문서번호	도로보수과-7763
결재일자	2016.8.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		도로보수과장
권세봉		08/09 이규철
협 조
	주무관		이상하

2016년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사

작업지시 완료 보고(제10차)

2016.  08. 08(월)

서부도로사업소

(도로보수과)

2016년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사

작업지시 완료 보고(제10차)

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2016년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사(연간단가)

○ 계약기간 : 2016. 02. 19. ~ 2016. 12. 31.

○ 시 공 사 : 미성건설(주) 대표 김지성

○ 도 급 비 : 609,281,300원

□ 작업완료 보고

○ 건    명 : 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사 작업지시(제10차)

○ 작업위치 : 은평구 통일로 연신내역~은평소방서(하행) 외 23개소

○ 작업기간 : 2016. 06. 21. ~ 2016. 07. 30.

○ 공사금액

구 분	당 초	변 경	증·감	비 고
도 급 비	112,597천원	94,800천원	감) 17,797천원
관급자재	62,489천원	54,500천원	감) 7,989천원

○ 작업내역

연번	장 소	당 초	변 경	증·감	증·감 사유
1	은평구 통일로 연신내역~은평소방서(하행)	4,048m	3,775m	감) 273m	실 작업량 변동에 따른 물량 차이
2	은평구 통일로 미성쇼핑~연신내역	13,170m	7,734m	감) 5,436m	일부구간 재도색 되어 물량 감소
3	은평구 통일로 녹번역 ~홍은사거리	13,783m	13,647m	감) 136m	실 작업량 변동에 따른 물량 차이
4	서대문구 통일로 무악재역~독립문역	18,762m	17,540m	감) 1,222m	일부구간 재도색 되어 물량 감소

연번	장 소	당 초	변 경	증·감	증·감 사유
5	용산구 서빙고동 235-9 서빙고역 교차로	59m	69m	증) 10m	실 작업량 변동에 따른 물량 차이
6	은평구 응암동 89-3	26m	38m	증) 12m	실 작업량 변동에 따른 물량 차이
7	중구 청계천로 장통교 앞	226m	173m	감) 53m	실 작업량 변동에 따른 물량 차이
8	마포구 마포대로11길(공덕래미안 5차 주변)	682m	780m	증) 98m	실 작업량 변동에 따른 물량 차이
9	은평구 가좌로 294 ↔ 295 명남아파트 앞	413m	406m	감) 7m	실 작업량 변동에 따른 물량 차이
10	마포구 신촌로 174↔서대문구 신촌로 171	881m	0m	감) 881m	토목공사 지연으로 작업취소
11	은평구 신사오거리 주변(증산로, 연서로)	1,383m	1,620m	증) 237m	실 작업량 변동에 따른 물량 차이
12	마포구 마포대로 대농빌딩 앞	974m	818m	감) 156m	실 작업량 변동에 따른 물량 차이
13	마포구 매봉산로 동아디지털미디어센터 앞	459m	450m	감) 9m	실 작업량 변동에 따른 물량 차이
14	마포구 백범로 펜트라하우스 앞	628m	806m	증) 178m	실 작업량 변동에 따른 물량 차이
15	용산구 녹사평대로 한강중R	48m	0m	감) 48m	기 작업되어 있음
16	마포구 큰우물로 염리초교 후문	190m	209m	증) 19m	실 작업량 변동에 따른 물량 차이
17	마포구 연남로 경성중학교 후문	257m	249m	감) 8m	실 작업량 변동에 따른 물량 차이
18	중구 남대문로 한국은행R(한국은행주변)	705m	0m	감) 705m	노후포장구간으로 작업예정
19	서대문구 옥천동 충정로지구대 앞	44m	0m	감) 44m	기 작업되어 있음
20	마포구 홍익로(걷고싶은거리)	1,252m	1,362m	증) 110m	실 작업량 변동에 따른 물량 차이
21	마포구 굴레방로 (아현초교 정문)	341m	277m	감) 64m	실 작업량 변동에 따른 물량 차이
22	은평구 구파발4R	212m	212m	-
23	마포구 공덕오거리 (남→북)	226m	348m	증) 122m	실 작업량 변동에 따른 물량 차이
24	중구 마른내로 67 앞	0m	201m	증) 201m	긴급으로 인한 추가 작업지시(민원)
25	합 계	58,769m	50,714m	감) 8,055m

○ 변경사유

- 실 작업량 변동에 따른 물량차이 : 16개소

- 기 재도색 완료되어 물량 감소   :  2개소

- 기 작업 완료 되어 물량 감소    :  2개소

- 노후포장구간 예정으로 작업취소 :  1개소

- 토목공사 지연으로 작업취소     :  1개소

- 긴급 민원으로 추가 작업지시    :  1개소

□ 향후계획

○ 상기 보고내용과 같이 실제 작업완료분 내에서 기성준공 처리.

붙 임 : 1. 제10차 작업완료 내역서 1부.

2. 제10차 작업완료 사진대지 1부(별도첨부).

3. 제10차 작업완료 도면 1부(별도첨부).  끝.