문서번호	도로보수과-749
결재일자	2014.2.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	성동도로사업소장
최영서		국중진	02/18 정진오
협조

설계변경(6차) 검토 보고

(2013년 도로손상부분 긴급복구공사-연간단가)

2014. 2.

성동도로사업소

(도로보수과)

설계변경(6차) 검토 보고

겨울철 한파와 강설량의 감소로 당초 예측했던 제설작업 공종별 수량에 변동이 있고 작년대비 겨울철 소파 급감으로 긴급복구반 투입 횟수 감소와 소규모 인력포장 물량 감소로 준공을 위한 설계변경 검토

�□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2013년 도로손상부분 긴급복구공사(연간단가)

○ 규    모

- 절삭후덧씌우기(t=5~20cm) 468a     - 소규모 인력포장(t=5~20cm) 88a

- 부대공 1식                        - 제설작업 1식

○ 계약금액 : 금1,193,511,000원

○ 계 약 자 : 파이알건설(주) 대표 서애란

○ 공사기간 : 2013. 3. 5. ~ 2014. 2. 28.

○ 공 정 률 : 100%

�□ 보고내용

○ ‘13/’14년 제설대책 공종별 물량 증, 감

- 당초 강설 빈도를 예측하여 공종별 추정치로 설계하였으나 실 투입량으로 변경

○ 전년대비 겨울철 강설 횟수 감소와 기록적 한파가 없어 소파발생 감소

�□ 변경내용

○ 주요공종 물량 변경

공 종	규 격	단위	수 량			비 고
			당 초	변 경	증 ․ 감
소파보수	인력포장	a	88	83	감 5
긴급복구반 운영		일	56	42	감 14
제설작업	민간	식	1	1	-	제설작업 공종별 수량 증, 감

○ 도급비 변경

공 종	금 액(원)			비 고
	당 초	변 경	증 ․ 감
계	1,193,511,000	1,137,400,000	감 56,111,000
1. 긴급복구공사	985,479,000	923,637,000	감 61,842,000
포장공	617,315,073	590,294,519	감 27,020,554
부대공	54,352,141	46,879,853	감 7,472,288
제경비	313,811,786	286,462,628	감 27,349,158
2. 제설작업	208,032,000	213,763,000	증 5,731,000

�□ 향후계획

○ 변경계약 의뢰(2.19.), 준공(2.25.)

첨  부 : 6차변경 내역서 1부.  끝.