투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신자	내부결재
(경유)
제 목	변경계약 - 관급자재 수량변경(정산) 요청 (한강공원 진입시설 보수보강공사)

1. 시설관리과-2387(2016.8.2.)호와 관련 입니다.

2. 시설관리과에서 시행중인 ｢한강공원 진입시설 보수보강공사｣에 소요되는 관급자재(미끄럼방지포장재)가 수량변경되어 아래와 같이 변경계약 하고자 합니다.

가. 변경계약 요청내용

남품요구번 호	품명	규격	물품식별번 호	단위	당초		변경		증 감
					수량	금액	수량	금액	수량	금액
12-16-1 -38582 -00	미끄럼방지포장재	t=2mm	22478755	㎡	789	25,169,100	749	23,893,100	감)40	1,276,000

나. 변경사유 : 정산에 따른 변경.

붙  임 : 변경요청 내역 1부. 끝.

주무관	최유섭		총무과장	08/09 박병현
협조자
시행	총무과-13917	(		)	접수		(		)
우	04770	서울시 성동구 강변북로 257, 한강사업본부 총무과 (성수동1가 642-25번지)	/
전화	3780-0713	/전송	3780-0740	/	yschoi21@seoul.go.kr	/	대시민공개