문서번호	인권담당관-8205
결재일자	2016.8.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	인권협력팀장	인권담당관	서울혁신기획관
류지원	이용재	代정정길	08/09 전효관

인권현장 표지석 및 조형물 제작・설치

용역 계약 연장 계획

2016. 8.

서울혁신기획관

(인권담당관)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

인권현장 표지석 및 조형물 제작・설치

용역 계약기간 연장

서울시 인권현장 표지석과 조형물을 제작・설치하는 용역과 관련 사업의 보다 내실 있는 수행을 위하여 용역기간을 연장하고자 함

□ 용역 개요

○ 용 역 명 : 「인권현장 표지석 및 조형물 제작・설치」

○ 용역기관 : ㈜삼양디자인

○ 용역기간 : ’15. 12. 15.~ ’16. 8. 15.

○ 계약금액 : 502,920천원

□ 추진현황

○ 1차 인권현장 선정회의(’16. 1. 6.)

- 인권현장 선정 및 표지석 설치 대상 장소 논의

- 인권로고 디자인 1차 논의

○ 2차 인권현장 선정회의(’16. 3. 15.)

- 서울시 인권현장 선정 및 표지석 설치 대상 장소 최종 선정

- 인권로고 디자인 및 인권 표지석 디자인 확정

○ 3차 인권현장 선정회의(’16. 6. 7.)

- 표지석 추가 설치 장소 논의(20개소)

- 표지석 설치 사업 명칭 결정(‘인권 서울 기억’)

○ 표지석 설치 예정지 답사(’16. 5.∼ 6. : 4회, 60개소) 및 관계 기관 협의

- 인권현장 보존 및 이용 현황 등 설치 장소 확인

- 관계기관· 단체 등에 사업 안내, 표지석 문안 내용 등 협의

○ 4차 인권현장 선정회의(’16. 7. 30.)

- 인권표지석 최종 문안 재작성(국문‧영문) 및 추가 협의 사항 전달

- 인권조형물 디자인 및 설치 장소 논의

□ 계약기간 연장

○ 연장 내용 : 계약 내용 변동 없이 계약 기간 연장

- 당    초 : ’15. 12. 15. ~ ’16. 5. 15.

- 1차 변경 : ‘15. 12. 15. ~ ‘16. 7. 15.

- 2차 변경 : ’15. 12. 15. ~ ’16. 8. 15.

- 3차 변경 : ’15. 12. 15. ~ ’16. 11. 30.

○ 연장 사유

- 대표 조형물 디자인 및 최종 설치 장소에 관한 협의가 필요하고

- 설치 예정지 답사 결과 통행량 및 안정성 등 설치 환경에 따른 위치 변경이 필요한 경우 해당 장소의 소유 및 관리자, 자치구와 협의가 예상되며

- 조정사항을 반영한 표지석 문구 재작성 및 번역 기간에 시일이 소요되므로 완성도 있는 사업 수행을 위해서 기간 연장이 요구됨

○ 계약금액 : 변동없음(지체상금 미부과)

□ 향후 계획

○ ’16. 8. ~ 9. : 영문 번역 보완 및 관계 자치구 협조

○ ’16. 9. ~ 11.: 인권현장 표지석 및 조형물 설치

□ 행정사항

○ 계약기간 연장 요청(재무과) : ’16. 8. 10. 이내