함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강서수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	화곡배수지 배수관망 형성공사 설계변경(최종) 시행

우리사업소에서 시행하고 있는『화곡배수지 배수관망 형성공사』에 대하여 아래와 같이 설계변경(최종)을 시행코자 합니다.

가. 공사개요

1) 공 사 명 : 화곡배수지 배수관망 형성공사

2) 공사기간 : 2016. 5. 9.~ 2016. 9. 28.

3) 규    모 : D=200㎜, L=443m (원형제수변실 5개소)

4) 계약업체 : 한신포장건설 대표 김동원

나. 설계변경 사유 : 공사현장 여건변동으로 인한 신규공종 및 물량 증감

다. 예산과목 : 구축물, 소블록 배수관망 개선, 시설비및부대비(시설비)

라. 설계변경내역                                           (단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 감
총 공 사 비	282,635,900	282,635,900	-
도 급 비	64,475,900	58,553,000	감) 5,922,900
관급자재비	34,110,000	31,762,000	감) 2,348,000
복구비 및 기타	184,050,000	192,320,900	증) 8,270,900

붙임 : 1. 설계변경 보고서 및 내역서 1부.

2. 설계변경 심의결과서 1부.

3. 설계도면 1부.  끝

주무관	이승환		시설관리팀장	김근용		시설관리과장	이병운		강서수도사업소장	08/09 代이원철
협조자	주무관	주은선		주무관	문정화		행정관리팀장	代윤경남
시행	시설관리과-19785	(		)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155 강서수도사업소 (신정동)	/
전화	3146-3995	/전송	3146-4039	/	leesh79@seoul.go.kr	/	대시민공개