투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신자	내부결재
(경유)
제 목	변경계약 - 관급자재 납품기한 연기요청(2016년 뚝섬한강공원 게이트볼장 개선공사)

1. 녹지관리과-3385(2016.8.5.)호와 관련 입니다.

2. 녹지관리과에서 시행중인 ｢2016년 뚝섬한강공원 게이트볼장 개선공사｣에 소요되는 관급자재(컨테이너하우스)가 납품기한 연기되어 아래와 같이 변경계약 하고자 합니다.

가. 변경계약 요청내용

납품요구번호	물품명 (식별번호)	단위	수량	납품기한		비고
				당초	변경
****************	******* **********	대	1	2016.8.8	2016.8.31

나. 변경사유 : 본공사 준공기한 연기에 따른 납품기한 연기

붙  임 : 변경요청 내역 1부. 끝.

주무관	최유섭		총무과장	08/09 박병현
협조자
시행	총무과-13959	(		)	접수		(		)
우	04770	서울시 성동구 강변북로 257, 한강사업본부 총무과 (성수동1가 642-25번지)	/
전화	3780-0713	/전송	3780-0740	/	yschoi21@seoul.go.kr	/	대시민공개