문서번호	설비부-1888
결재일자	2014.2.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관	시책사업과장	설비부장
유영선	이흥복	02/18 박기형

월계2교 외 1개소 확장 전기공사

실 정 보 고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 02

도시기반시설본부

[설 비 부]

월계2교 외 1개소 확장 전기공사 실정보고

『월계2교 외 1개소 확장 전기공사』 중 성산2교 가로등 설치공사에 대한 현장 실정을 검토하고 보고드림

공사개요

○ 공 사 명 : 월계2교 외 1개소 확장 전기공사

○ 공사규모

- 월계2교 : 분전함 1면, 가로등 3본 이설

- 성산2교 : 분전함 1면, 가로등 6본 이설

○ 도급금액 : 44,788,784원

○ 공사기간 : 2013. 05. 13 ~ 2014. 12. 31.

○ 시 공 사 : ㈜성림전설  대표 권해숙

검토내용

위 치	구 분	현 황 및 문 제 점	검 토 의 견	비 고
성산 2교	노 출 전선관	- 성산2교 교량상류측 측부에 설치되어 있는 노출 전선관이 보도 확장공사시 저촉되어 철거 및 재설치가 필요하나 설계에 누락되어 있음.	- 노출된 전선관을 설계에 반영보도부분 콘크리트에 매입 설치

조치의견

○ 상기 검토의견과 같이 변경 시공토록하고 추후 설계변경에 반영하고자 합니다.

첨부 : 성산2교 노출 전선관.  끝.

성산 2교 노출 전선관

○ 기존 노출전선관