문서번호	시설보수과-2657
결재일자	2016.8.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
시설팀장	시설보수과장	난지물재생센터소장
김재봉	강병수	08/10 정흥순
협 조

- 2016년 홍제천 및 지천관로 보수공사 - 기성금(1회) 지급 검토 보고

2016. 8

난지물재생센터

(시설보수과)

- 2016년 홍제천 및 지천관로 보수공사 -

기성금 지급(1회) 검토 보고

□ 사업개요

❍ 사 업 명 : 2016년 홍제천 및 지천관로 보수공사

❍ 사업기간 : 2016. 5. 9 ~ 2016. 12. 4

❍ 사업위치 : 홍제천 상명여대 하류 400m지점 ~ 홍제교간

※ 현재 비굴착갱생 D=1,500mm L=927m 보수완료(공정율:50%)

❍ 사업규모 : 비굴착갱생 D=1,500mm L=1,422m

사각암거 보수 1.5m×1.8m, L=121m

❍ 도 급 자 : ㈜ 승일토건 박영온

❍ 도 급 비 : 2,335,300천원

□ 기성금 요청내용

❍ 기성금 지급 신청일 : 2016. 8. 8

❍ 기성금 요청내역

계약 금액	금회 요구액	지출 후 잔액
2,335,300천원	923,670천원(39.55%)	1,411,630천원

□ 검토결과

❍ 현재 원형관로 비굴착갱생을 D=1,500mm L=927m 완료한 상태   이나, 기성금 지급 신청은 D=1,500mm L=722m 신청

❍ 실 공정율(50%)보다 기성금은 적게 신청한 상태(39.55%)로 도급자의 요청에 의거 제1회 기성금을 지급코자 함.

붙임 : 1. 기성내역서 1부.

2. 사진대지 1부. 끝.