투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신자	내부결재
(경유)
제 목	변경계약 - 관급자재 납품기한 연기요청(관급자재 엘리베이터 구매 - 한강공원나들목 증설공사(신청담))

1. 치수과-2759(2016.8.8.)호와 관련 입니다.

2. 치수과에서 시행중인 ｢관급자재 엘리베이터 구매 - 한강공원나들목 증설공사(신청담)｣에 소요되는 관급자재에 대하여 아래와 같이 납품기한 연기 하고자 합니다.

가. 변경요청 내역

물품분류 번 호	품 명	규 격	단위명칭	수량	납 품 기 한		비 고
					변경전	변경후
22572852	엘리베이터	지엠메디테크 JA MRL-2401, 60m/min,24인승/ 2층/MRL식	대	2	2016.7.20	2016.12.30	사용시기 미도래
22572862	엘리베이터 (내부의장)	지암메티테크 PE-3,내부의장 /STS+접합유리,24인승	조	2
22354245	엘리베이터 (외부마감재)	지암메디테크 CM-2400SC, 외부마감재/사각커튼월/ 24인승	조	1
22571381	엘리베이터 (1층추가)	지암메디테크 JA MRL-2404, 24인승,1층추가	층	4
22353336	엘리베이터 (대리석바닥재)	지암메디테크 SM-PM-24, 대리석바닥재,24인승	대	2
22354356	냉방기	냉방기 지암메디테크 SM-AC-3,3.6kw	대	2

나. 변경사유 : 사용시기 미도래

붙  임 : 변경요청 내역 1부.  끝.

주무관	최유섭		총무과장	08/10 박병현
협조자
시행	총무과-13996	(		)	접수		(		)
우	04770	서울시 성동구 강변북로 257, 한강사업본부 총무과 (성수동1가 642-25번지)	/
전화	3780-0713	/전송	3780-0740	/	yschoi21@seoul.go.kr	/	대시민공개