함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강동수도사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	계약이행 촉구

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀사와 서울시가 2016.4.29.일 계약을 체결하여 진행중인 『천호동 157-3~166-43 외 8개소 배급수관정비공사』와 관련하여 현재 공사진행이 당초계획보다 지연되고 있어 공사촉구를 통보하오니

3. 준공기한내 공사가 완료될 수 있도록 특단의 조치를 강구하고, 2016.8.19.일까지 공정을 만회할 수 있는 세부계획서를 제출하여 주시기 바라며

4. 또한, 공사지연에 따른 불이익 처분을 받지 않도록 공정관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

5. 아울러, 서울특별시시설관리공단에서는 공사가 지연되지 않도록 공사감독 업무수행에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.  끝.

	강동수도사업소장
수신자	예림이앤지(주) 대표 김영자님,서울특별시시설관리공단이사장
주무관	양봉우		주무관	송종범		시설관리과장	08/10 남정열
협조자
시행	시설관리과-16498	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 51 (성내동 541-4)	/
전화	3146-5198	/전송	3146-5239	/	ybw13@seoul.go.kr	/	대시민공개