문서번호	시설보수과-6779
결재일자	2016.8.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설보수과장
이동섭		김지환	08/10 신동헌
협조

- 사천교 확장 및 성능개선공사 -

지장전주 이설 실정보고 사항 검토보고

2016. 8.

서부도로사업소

(시설보수과)

- 사천교 확장 및 성능개선공사 -

지장전주 이설 실정보고 사항 검토보고

우리 사업소에서 시행중인 「사천교 확장 및 성능개선공사」중 기초 파일 항타작업 간섭에 따른 한전주(배전선로) 이설 검토 보고임.

※ 관련근거 : 한전 성서지(고객) 695(2016.8.8)호

건설사업관리단 사천16-28(2016.8.9)호

공사개요

○ 공 사 명 : 사천교 확장 및 성능개선공사(장기계속)

○ 규    모 : 교량확장 폭30m → 37m, 6차로→9차로

성능개선 폭10m, 연장 90m, DB18→DB24

○ 공사기간 : 2016. 4 ~ 2017. 10

○ 시 공 사 : 신안종합건설

○ 감 리 단 : ㈜한국건설관리공사, ㈜대한콘설탄트

○ 계약금액 : 총차-3,109백만원 (1차-2,398백만원)

실정보고 내용

○ 사천교 수색방향 홍제천 횡단 고압선으로 인하여 P3, P4, A2 기초파일 항타작업 간섭에 따른 감전사고 위험이 있어 전주 1본 이설 필요

○ 연희IC방향 교량 확장에 저촉되는 지선주 1본 철거 필요

<고압전주 이설>	<지선주 철거>

감리단 검토 내용

○ 항타작업 시 고압선로 근접에 따른 감전사고 예방을 위하여 한전주를 이설하는 사항으로서, 기초파일 항타 시 고압선로와의 안전한 이격거리를 확보하고자 가이설을 반영한 사항은 타당함.

○ 남측 지선주는 추후 교량 확장 시 필히 이전되어야 하므로 철거 조치는 타당함.

○ 이전대상 전주 수량은 현장조사 내용을 반영하여 적정하며, 공사비는 한전 청구 고지 금액을 반영함.

- 배전선로 이전 부담금액 : 39,990,150원

보고자 의견

○ 한전 협의 결과 여름철 전력수요 상승으로 임시 단전은 불가능하고,

○ 전주 이설 가능한 부지 내 가스관로가 매설되어 있으며, 인접한 가로 공원내 영구 이설은 전주 유지관리 및 안전에 지장을 초래하여 항타작업에 지장이 없는 적정 이설 위치 확보가 어려운 실정임에 따라,

○ 작업중 고압선로와의 안전한 이격거리 확보를 위하여 공원 내 부지로 임시 가이설 후 파일 항타작업이 완료되면 보도구간으로 본이설 조치코자 함.

※ 이설비 예산 검토

- 사천교 확장 교통개선분담금 예산 여건으로 금년도 1차공사 예산에 이설비가 미반영 되어 있으므로, 1차 계약 낙찰차액을 사용하여 이설공사비를 납부코자 함. (낙찰차액 : 357,780천원)

조치계획

○ 상기 보고내용과 같이 작업중 전기 안전사고 예방을 위한 전주 이설이 필요하므로 한전에서 고지된 배전선로 이전 부담금을 즉시 납부하여 조속히 이전 조치코자 함.

붙임 : 1. 감리단 실정보고서 1부.

2. 한전 배전선로 이설 부담금 청구 안내 공문 1부.  끝.