문서번호	방재시설부-12620
결재일자	2016.8.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		방재시설과장	방재시설부장
이석근		이도헌	08/10 임춘근
협조

공릉제2빗물펌프장

시설미비사항 조치계획보고

2016. 8. 10.

도시기반시설본부

방재시설부

『공릉2빗물펌프장 신설 및 면목4동 배수관로 설치공사』

시설미비사항 조치계획 보고

우리 본부에서 시공완료한「공릉2빗물펌프장 및 면목4동 배수관로 설치공사」과 관련으로 펌프장 인수인계전 시설미비사항에 대한 조치 계획 보고임.

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 공릉2빗물펌프장 및 면목4동 배수관로 설치공사

○ 위    치 : 노원구 공릉동  406-3호 주변

○ 사업규모 :

구 분	설 계 규 모	비 고
펌프장	•배수펌프 520㎥/min(260㎥/min×2대) •보조펌프 20㎥/min •흡수정 V=2,722㎥
유입관로	•B1.0m×H1.0m, L=70m •B1.5m×H1.5m, L=147m •B2.0m×H2.0m, L=151m •가동보 B2.4m × H2.1m
토출관로	•D1,500㎜×2, L=132m(61.9m+70.5m)

○ 공사기간 : 2013. 1. 8 ∼ 2016. 6. 30.

○ 시 공 사 : ㈜서한기술공사   대표 김성찬

○ 감 리 사 : 서울시시설관리공단

□ 추진현황

○ '16.06.30 : 공사준공

○ '16.07.21 : 공릉2빗물펌프장 개소식 개최(노원구청 주관)

○ '16.08.05 : 빗물펌프장 인수인계 절차 이행에 따른 미비사항 보완(예산요청)

(노원구청 물안전관리과-13781호, 2016. 8. 5)

〔 시설 미비사항 〕

분야별 보완사항					소 요 예 산
토 목	건 축	설 비	전 기	기 타
·집수정내 바닥보강	·지배수펌프라인변경 ·청소용 수도배관 ·집수정수위표 설치 ·펌프실 배기팬 설치 ·보안철문 설치	·옥상바닥 에폭시 추가시공 ·1층 사무실 보완	·운영사무실 CCTV	·현황판(유역도) ·간판설치 ·번호키	150백만원

□ 검토의견

○ 노원구청에서 요구한 미비사항에 대하여 시공업체로 하여금 보완토록 업무지시가 어려운

상황( '16.06.30. 준공)이며,

○ 노원구청과 빗물펌프장 인수인계 절차가 이행되지 않은 상태이므로  본 사업의 배정잔액

범위내에서 노원구청에서 시설미비사항을 보완할 수 있도록 예산지원하고 시설보완

완료후 정산결과를 제출토록 조치

·예산배정액 : 1,790백만원,    ·지출원인행위액 : 1,655백만원,   ·집행가능액 : 134백만원

○ 아울러, 빗물펌프장 인수인계 절차를 본 건과 함께 조치함이 타당할 것으로 사료됨.

※ 본부 내 건축, 기계, 전기, 조경 등 인계자료를 수합하여 절차이행예정

□ 행정사항

○ '16.08.10 : 세입세출외 현금영수증 발부요청(본부→노원구청)

○ '16.08.11 : 각 부별 인수인계 목록 및 자료 수합

○ '16.08.12 : 공릉2빗물펌프장 인수인계서 송부(본부→노원구청)

붙임 1)관련공문서 사본 1부.

2)예산배정 및 원인행위액 현황 1부.  끝.