보    고    서

등록번호	급수운영과-17831

결재	주무관	급수설비팀장	급수운영과장
	김선찬	代김영환	08/11 김수영

명에 의하여 지역담당 업무 수행 중 급수공사 연기 요청이 제기되어 아래와 같이 현장을 조사 하고 그 결과를 보고합니다.

2016. 8. 11.

복 명 자 : 지방시설9급 김선찬

1. 현  황

○ 위치 : ************

○ 관로현황

- 구경 : 독립계량기 20mm * 1

○ 민원인 :***********************

○ 내  용 : 상기 민원은 기존 건물로서 구경확대를 요청한 사항임.

2. 보고 내용

○ ****에서 급수공사를 시행하려 하였으나 현장소장과 수용가가 공사에 대해

결정을 보류 한다 알려와 시행 여부를 8월 31일까지 알려 준다고 함.

○ 급수공사 기한은 8월 12일까지로 수용가의 시행여부 통보 및 급수공사 기간을

고려하여 급수공사 기한을 9월 10일까지 연기코자함.

3. 조치 의견

○ 급수공사에 시행에 민원이 생기지 않도록 만전을 기하고자 함.