문서번호	기전과-6352
결재일자	2016.8.11.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	성동도로사업소장
신대중		박심근	08/11 이종엽
협조
	주무관		代신대중

『2016년 교통사고 잦은곳 개선 교통신호기 공사』 서울시체육회 설계변경 검토보고

2016. 8.

성동도로사업소

(기  전  과)

『2016년 교통사고 잦은곳 개선 교통신호기 공사』

서울시체육회 설계변경 검토보고

「2016년 교통사고 잦은곳 개선 교통신호기 공사」의 설계 변경 서류가 접수되어 관련 서류 및 현장 확인 후 그 결과를 보고합니다.

▣ 관련근거

○ ㈜트래픽스 TR-개선-0801호(2016.08.02.)

- 서울시체육회 설계변경 제출

○ 성동도로사업소 기전과-5355호(2016.07.11.)

- 감리실정보고 검토 보고

▣ 공사개요

○ 공 사 명 : 2016년 교통사고 잦은곳 개선 교통신호기 공사(서울시체육회)

○ 도 급 자 : 대영엔지니어링 대표 안재현

○ 도 급 비 : 금32,431,422원(금삼천이백사십삼만일천사백이십이원)

○ 공사기간 : 2016.  5. 24 ∼ 2016. 12. 31

○ 감 리 원 : ㈜트래픽스 장지용

▣ 설계변경 현황

○ 설계변경 사유

- 현장실정보고에 따른 설계변경 사항이 발생하여 물량 및 경비를 정산하고 준공처리코자 합니다.

○ 현장실정 보고내용                                            (단위 : 원)

당 초	변 경	변경사유	증감액
-	-교통신호제어기 및 좌대 교체	-제어기 내구년수(10년)이 지나 교차로 개선 작업시교체필요	증)2,582,673
-	-버스전용차로용 신호등 신설4조	-성동도로사업소 요청으로 버스전용차로 전용 차량신호등교체에따른물량변경	증)1,191,000

당 초	변 경	변경사유	증감액
-음향신호기 신설2대 -음향신호기 철거2대 -음향신호기 압버턴 신설2대 -음향신호기 압버턴 철거2대	-음향신호기 신설3대 -음향신호기 철거3대 -음향신호기 압버턴 신설3대 -음향신호기 압버턴 철거3대	-교차로내 음향신호기 고장으로 추가 교체 필요	증)1,082,312
-Ø250 통합형 철주 신설1본 -Ø250 철주 신설1본 -Ø150 철주 신설2본 -통합형 가로 설치1식	-Ø250 철주 신설2본 -Ø125 철주 신설2본 -통합형 가로등 물량 삭제	-통합형 철주 설치시 고압 케이블과 접촉되어 설치가 불가 및 지중선로 선통됨에 따라 철주 규격 변경	감)4,188,914
-보행,잔여시간,보도등 이설2조	-보행,잔여시간,보도등 이설3조 -Ø125 철주 철거1본 -디자인지주 보행용 보호금구신설1조	-불필요한 보행철주 철거	증)341,166
-기초앙카 Ø250 신설2조 -기초앙카 Ø150 신설2조 -조가선 및 애자 밴드 설치	-기초앙카 Ø250 신설2조 -기초앙카 Ø125 신설2조 -조가선 및 애자 밴드 설치 신규일위대가적용	-기초앙카 거푸집, 애자 및 밴드, 조가선 신규일위대가 적용 및 현장여건에 따른 물량 변경	감)1,026,284
-신호케이블 F-CVV 2.5㎟ 및 가공선로	-신호케이블 F-CVV 1.5㎟ 및 지중선로로변경	-한국전기안전공사 선울(점검부)-1345호 관련 신호케이블 1.5 사용가능 및 현장여건에 따른 선로 변경등	증)84,174
-교통신호등지주 Ø150 철거2본 -기초앙카 제거(전체) Ø150 철거 2본 -철거 설치 불럭 포장등	-교통신호등지주 Ø250 철거2본 -기초앙카 부분제거 Ø150 철거2본	-설계오류에 따른 물량 변경	감)103,864
-교통정리요원 배치 신설2인	-교통정리요원 배치 신설6인	-교통정리요원 인원 및 시간이 공사시간내 작업이불가하여물량추가	증)602,804
-	-기타현장여건에 따른 물량 변경	-장여건과 상이한 부분이 발생하여 물량 변경	감)409,015

○ 보험료 정산

당 초	변 경	변경사유	증감액
-	-건강보험료,연금보험료,노인장기요양 보험료 내역서 물량 삭제	-일용직근로자 미채용으로 인하여 보험료 정산	감)485,639

○ 도급비 변경내용                                     (단위 : 원)

구 분	당초	변경	증·감액	비 고
도급비	32,431,422	32,431,422	-	금액변경 없음

▣ 조치의견

○ 상기와 같이『2016년 교통사고 잦은곳 개선 교통신호기 공사(서울시체육회)』에 대하여 설계변경하여 공사추진에 만전을 기하고자 합니다.

붙     임 : 1. 1구역 설계변경 제출 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 합의각서 1부.

4. 제비율검증 1부. 끝.