투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	성동도로사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2013년 도로시설물 세척 용역 설계변경(2차) 시행

우리사업소에서 시행중인 2013년 도로시설물 세척용역에 대하여 아래와 같이 설계변경(2차)하여 도로시설물 청결관리에 만전을 기하고자 합니다.

가. 용 역 명 : 2013년 도로시설물 세척 용역(성동)

나. 도 급 자 : ㈜비에프디 대표 감병철

다. 용역기간 : 2013. 03. 26 ~ 2014. 02. 28

라. 계약금액 : 금261,508,340원

마. 변경내용 : 세척대상시설물 변경 및 총 세척물량 감소

- 도급비 변경 내역

변 경 전	변 경 후	증,감액
261,508,340원	244,286,900원	감 17,221,440원

바. 예산과목

- 도로시설관리, 도로시설물운영, 도로시설물 일상유지보수공사, 시설비

- 교량관리, 교량시설물운용, 도로시설물(교량관리), 일상유지보수공사, 시설비

별 첨 : 1. 설계변경 검토 보고서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.  끝.

★주무관	진하영		시설보수과장	박춘배		성동도로사업소장	02/19 정진오
협조자	관리단속과장	代김성태		계약1팀장	김점선
시행	시설보수과-628	(		)	접수		(		)
우	133-851	서울시 성동구 자동차시장길 41(용답동)	/
전화		/전송	02-2210-1562	/	shinminrain@seoul.go.kr	/	대시민공개