문서번호	기전과-1646
결재일자	2014.2.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관		기전과장
전윤섭		전결 02/19 장경옥
협 조

2013년 터널기전시설물 유지보수공사(연간단가)

설계변경 수정보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 2.

서부도로사업소

(기전과)

2013년 터널기전시설물 유지보수공사(연간단가) 설계변경 수정보고

2013년 터널기전시설물 유지보수공사(연간단가)와 관련  제1차~제3차의 작업완료에 따른 물량 증․감에 대하여 아래와 같이 설계변경코자 함

□ 관련근거

○ 기전과-2226(2013.3.4.)호「제1차 작업지시」외 2건

□ 공사현황

○ 공사명 : 2013년터널기전시설물유지보수공사(연간단가)

○ 도급자 : 진한전설주식회사 대표이사 최원석

○ 공사금액 : 금135,741,910원

○ 공사기간 : 2013.3.5.~2014.2.28.

○ 공사규모 : 터널기전시설물유지보수 1식

□ 설계변경사유

○ 실시공에 따른 시공물량 정산 및 조정

□ 설계변경내용

○ 공사비 변경(감액)                                         (단위:원)

구 분		당 초 금 액	변 경 금 액	증 감	비고
총 공 사 비		135,741,910	131,218,000	감 4.523,910
도급비	공급가액	123,401,737	119,289,091	감 4,112,646
	부가가치세	12,340,173	11,928,909	감 411,264
	계	135,741,910	131,218,000	감 4.523,910

□ 조치계획

○ 상기 연간단가공사의 제1차~3차작업완료됨에 따른 시공물량 증․감 등으로 계약금액 설계변경(감액) 시행코자 합니다.

붙임  1. 설계변경내역서 1부.

2. 제비율검증확인서 1부.  끝.