등록번호	도로시설과-11799		주무관		도로조명팀장	도로시설과장		안전건설국장		부구청장
등록일자	2016.8.11.
			백호선		정철모	이동훈		이우룡		08/11 황치영
결재일자	2016.8.11.
공개구분	대시민공개
			협조
『을지로동 LED 보안등 광원개선공사』 발주잔액 및 낙찰차액 사용계획
안전건설국 도로시설과

『을지로동 LED보안등 광원개선공사』

집행잔액(발주잔액+낙찰차액)사용계획

우리구에서 시행하는『을지로동 LED보안등 광원개선공사』와 관련

발생한 집행잔액(발주잔액 + 낙찰차액)에 대하여 시공물량 증·감

사항을 반영하여 증액된 공사비와 관급자재비로 사용 하고자 함

공사개요

공 사 명 : 을지로동 LED보안등 광원개선공사

계 약 자 : ㈜다인이엔씨  대표 김도윤

공사기간 : 2016. 05. 02. ~ 2016. 08. 29.

규    모 : LED보안등 135개소 교체 및 신설

사 업 비 : 84,000천원(주민참여예산)

예산집행 현황

예산집행 현황

(단위:원)

구 분	발주금액	계약금액	낙찰차액	집행잔액 (발주잔액+낙찰차액)
총공사비	84,000,000	80,143,100	3,778,530	3,856,900
도 급 비	29,150,000	25,371,470	3,778,530	3,778,530
관 급 비	54,771,630	54,771,630
미품의금액	78,370			78,370

집행잔액 사용계획

LED보안등 광원개선공사 구간중 어두운 사각지역에 대하여 보안       등을 추가 신설하여 도로조명 환경개선

보안등 추가설치에 따른 공사비 및 자재비 증액분에 대하여 집행       잔액(발주잔액+낙찰차액)3,856,900 원을 활용하여 공사추진하고       추후 실제작업물량 정산분에 대하여 설계변경 반영코자 함

예산과목 : 도로시설과, 도시기반시설확충, 도로조명관리, 가로       등 보안등 설치 및 정비, 시설비 및 부대비, 시설비. 끝.